내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(한양도성안 도로공간재편 시범사업 기본 및 실시설계용역)

우리과에서 시행 중인 「한양도성안 도로공간재편 시범사업 기본 및 실시설계용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요 및 준공기한 연기 내역

ㅇ 용 역 명 : 한양도성안 도로공간재편 시범사업 기본 및 실시설계용역

ㅇ 계 약 자 : ㈜태조엔지니어링 대표 한명식

ㅇ 준공기한

- 당초 : 2014. 12. 31

- 변경 : 2015.  2. 28

나. 귀책사유 : 서울특별시

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 용역계약 변경합의서 1부.  끝.

	도로계획과장
전문관	박찬규		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	12/15 형태경
협조자
시행	도로계획과-16349	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 10층 도로계획과	/
전화	2133-8064	/전송	2133-0764	/	chan0112@seoul.go.kr	/	대시민공개