투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	「2014년 노후포장도로정비 노면표시공사-서부」 변경계약 요청

1. 도로보수과-11159(2014.12.12.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행 중인 『2014년 노후포장도로정비 노면표시 공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회) 시행코자 하오니 변경계약등 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 노후포장도로정비 노면표시공사-서부

나. 공사기간 : 2014.05.12 ∼ 2014.12.31

다. 도 급 자 : 리인건설 대표 김장우

라. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감	비 고
총 공 사 비	419,680,750	515,805,900	증)96,125,150
도 급 비	200,094,750	263,736,000	증)63,641,250
관 급 비	215,586,000	252,069,900	증)36,483,900
이 전 비	4,000,000	0	감)4,000,000

마. 설계변경 사유 : 포장도로 정비공사 물량 변경에 따른 노면표시물량 증가

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리

(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임   1) 설계변경(제1회) 시행 1부.

2) 설계변경내역서 1부.

3) 제비율 검증결과 1부.

4) 합의각서 1부.   끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	최정필		도로보수과장	12/15 이규철
협조자	주무관	이상하
시행	도로보수과-11170	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8355	/전송		/	jp2575@seoul.go.kr	/	대시민공개