문서번호	급수운영과-25237
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		12/15 최임봉
협 조

설계변경 심의위원회 개최

「2014년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사」

2014. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경(2차) 심의위원회 개최

「2014년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속)」에 대하여 사업소 자체 설계변경 심의 위원회를 개최하여 설계변경 시행코자 함

□ 설계변경 현황

❍ 공 사 명 : 2014년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속)

❍ 공사개요

- 당초 : 노후밸브정비 154개소, 소화전정비 70개소, 기타 52개소

- 변경 : 노후밸브정비 142개소, 소화전정비 25개소, 기타 53개소

❍ 계약기간 : 2014.04.22 ~ 2015.04.30

❍ 도 급 비 : 금624,961,000원(변경 없음)

❍ 도 급 자 : 상협건설 대표 주상호

□ 심의위원회 개최

❍ 심의위원장 : 급수운영과장

❍ 심의위원 : 급수운영과 시설6급 이승우, 시설7급 박홍선 시설7급 이보민

급수운영과 시설7급 이정훈

❍ 개최일시 및 장소

- 일시 : 2014. 12. 15(월) 13 : 00

- 장소 : 급수운영과

□ 심의내용

❍ 계약물량 증감 및 제경비 적정산정 여부 등 기타 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

- 신규공정 적정산정 여부

붙임 : 설계변경(2차) 요약 보고

설계변경(2차) 요약 보고

□ 공 사 명 : 2014년 강남구 관내 상수도시설물 및 소화전설치 보수공사(장기계속)

❍ 공사개요 : 노후밸브정비 142개소, 소화전정비 25개소, 기타 53개소

❍ 계약기간 : 2014.04.22 ~ 2015.04.30

❍ 도 급 비 : 금624,961,000원(변경 없음)

❍ 도 급 자 : 상협건설 대표 주상호

□ 변경사유

❍ 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 물량증가 : 기계다짐(보통)(콤펙터 1.5ton)공정 등 11개 공정

- 물량감소 : 고압블록 포장걷기(면적10㎡미만) 공정 등 67개 공정

- 제경비 조정 : 물량 증ㆍ감에 따른 금액변경 9개 항목 발생

❍ 신규공정에 따른 계약물량 조정

- 신규공정 : 주철(이형관)부설공(900mm) 등 28개공정

설계변경 내역                                      (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증ㆍ감
도 급 비	624,961,000	624,961,000	-
공 급 가 액	568,146,364	568,146,364	-
부가 가치세	56,814,636	56,814,636	-

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.