시 행	설비부-14289
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	환경설비과장	설비부장
	배수웅	이달영	12/15 박기형

설계변경 자문회의(소위원회) 심의결과(제24차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-14032호				요청부서		열빛총괄과		심의일자		2014.12.16
공 사 명			염창2외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사
공 사 개 요			공사규모				수변전설비공사, 전력간선공사, 전등,전열 및 제어공사, 임시전기실 수배전반 설치 공사
			공사기간				2013.03.13. ~ 2014. 12.31
			감 리 사				(주)신화이에프원
			설 계 사				(주)선진엔지니어링
			시 공 사				(주)투윈스컴
심의요청사유							∘ 3,000만원 이상 설계변경(증액)
<설계변경 사유> ○ 강서구청 요구사항반영(염창2-LED등 반영, CCTV 추가 및 이설, 강우량계 설치, 열반 조정 및 정류기반 수리 등) ○ 방화펌프장 관리동(준설토 적치장) 설치에 따른 전기설비 및 인입 특고, 저압케이블 및 제어케이블 교체 등
원설계자 의견
심의결과		조건부			붙임 심의위원 지적사항 보완 조건
심의결과 조치					· 심의위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			김창균				간 사		배수웅
	위 원			김두환				위 원		이재홍
	위 원			성호준				위 원		유영선