문서번호	급수설비과-2590
보존기간	년
결재일자	2013.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
박은선	김인환	이상홍	05/16 김준기
협 조
	시설관리부장		윤석우
	누수방지과장		김종문
	주무관		김도섭
	주무관		박종일

상수도공사(급수, 긴급누수복구)시공감독업무 위탁용역

물량 변경에 따른 계약금액 조정계획

2013. 05. 14

상수도사업본부

(급수설비과)

상수도공사(급수, 긴급누수복구)시공감독업무 위탁용역

물량 변경에 따른 계약금액 조정계획

2011.5.24 계약체결하여 시행중인 『상수도공사(급수, 긴급누수복구) 시공감독업무 위탁용역』에 대하여 아래와 같이 계약금액 조정코자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 상수도공사(급수, 긴급누수복구)시공감독업무 위탁용역(장기계속단가계약)

○ 계약기간 : 2011. 5. 24 ~ 2013. 5. 24

○ 위탁내용

- 급수공사 및 인입관 철거폐쇄 등 38,000건, 누수복구공사 등 42,000건

○ 계약금액 : 9,983,600천원(’13.4까지 기성금액 9,095,570천원)

○ 수 탁 자 : (주)이준엔지니어링 이방열

(주)건양엔지니어링 이승헌

※ 2013. 2. 6 수탁자 상호 및 대표자 변경

□ 계약금액 조정계획

○ 조정계획(총부기금액)                               (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감
총 용역비		9,983,600,000	9,396,090,000	감)587,510,000
도급비	공급가액	9,076,000,000	8,541,900,000	감)534,100,000
	부 가 세	907,600,000	854,190,000	감)53,410,000
	계	9,983,600,000	9,396,090,000	감)587,510,000

- 단가계약금액은 변경없음

○ 조정사유

- 시간외(야간) 근무자 익일 휴무에 따른 평일 투입인원 감소(23인,월)

․ 중급기술자 : 7인,월(480인,월 → 473인,월)

․ 초급기술자 : 16인,월(936인,월 → 920인,월)

- 휴일, 야간공사 감소에 따른 휴일 등 시간외 투입인원 감소(1,249인,일)

․ 중급기술자 : 695인,일(1,598인,일 → 903인,일)

․ 초급기술자 : 554인,일(2,750인,일 → 2,196인,일)

- 각종 보고자료 일부를 전자문서화 및 축소 조정하여 도서인쇄량 감소

․ A4흑백 복사 : 30,520매(88,720매 → 58,200매)

․ A4칼라 복사 : 70매(330매 → 260매)

․ 제본         : 104권(240권 → 136권)

․ 각종양식     : 560권(560권 → 0권)

□ 향후계획

○ ’13. 5. 15 : 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(본청 재무과)

○ ’13. 5. 24 : 준공{이후 감리비용 최종분(’13.5) 지급}

붙  임 : 계약금액 조정(설계변경)내역서 1부. 끝.