문서번호	급수운영과-25254
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이정훈		12/15 최임봉
협 조
	주무관		윤복철
	주무관		송종학
	주무관		박종태
	주무관		이승우

설계변경(2차) 심의 의견서(2014년 신사동외 6개동 상수도공사)

2014. 12.

강남수도사업소

설계변경(2차) 심의 의견서

□ 공 사 명 : 2014년 신사동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

신청부서명	급수운영과
작 성 자	이 정 훈
심의일시	2014. 12. 15(월)

□ 심의위원회 의견

❍ 심의일시 : ‘14. 12. 15(월) 10:30

❍ 심의의견 : 설계변경회 심의 의견을 아래와 같이 제시함

구 분	직위	심의결과	성 명	비 고
위원장	급수운영과장	적정함	최 임 봉
위 원	시설관리과 시설6급	적정함	윤 복 철	제잡비 적용 적정
위 원	시설관리과 시설7급	적정함	송 종 학	신규일위대가 적정
위 원	급수운영과 시설6급	적정함	박 종 태	토공 물량 적정
위 원	급수운영과 시설6급	적정함	이 승 우	부설,부대공 물량 적정

설계변경(제2차) 요약 보고

□ 공 사 명 : ‘14년 청담동외 6개동 상수도공사(장기계속계약)

❍ 공 사 명 : 2014년 신사동외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

❍ 공사규모 : D=13~300㎜, L= 2,537m

❍ 계약기간 : 2014.06.19 ~ 2015.06.30

❍ 도 급 비 : 금503,664,050원

❍ 도 급 자 : 미나미건설㈜ 대표 윤석일

□ 변경사유

❍ 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약물량 조정

- 물량증가 : 콘크리트포장절단(100~150mm) 공정 등

- 물량감소 : 아스팔트깨기(소형브레이커) 공정 등

❍ 신규공정에 따른 계약물량 조정

- 신규공정 : 주철직관 부설공 400mm(야간) 등

□ 설계변경 내역                                 (단위 : 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증ㆍ감
도 급 비	503,664,050	503,664,050	-
공 급 가 액	457,876,409	457,876,409	-
부가 가치세	45,787,641	45,787,641	-

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.