과 장		12/15 김권일	심사자	천석기		설계자	전재형		설 계	심 사		결 재
									2014 년 12월 일	2014년 12월 일
설 계 변 경 서(3회)
	공 사 명 : 2014 관내 도로시설물 일상유지보수공사
	구 분				금 액						비 고
					당 초			변 경			증. 감
	총 공 사 비				1,740,921,000원			1,740,921,000원			변경없음
	도급비	공 급 가 액			1,328,110,000원			1,414,473,637원			증 86,363,637원
		부 가 가 치 세			132,811,000원			141,447,363원			증 8,636,363원
		소 계			1,460,921,000원			1,555,921,000원			증 95,000,000원
	관 급 비				200,000,000원			147,980,000원			감 52,020,000원
	이 전 비				80,000,000원			37,020,000원			감 42,980,000원