투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	실정보고 검토결과(계측기 설치)

1. 서울특별시시설관리공단 공감감독2처-20749(‘14.12.02) “공사실정 보고서 제출(계측기 설치)”호와 관련입니다.

2. 우리센터 “분뇨처리시설 유입저류조 증설공사”와 관련하여 계측기설치 필요성을 검토하고 아래와 같이 조치코자 합니다.

◯ 실정보고 내용

- 필 요 성 : 지중경사, 지하수위, 스트러트 변형 등을 확인 및 교정하기 위해 계측기 필요

************************************************************

**************************************

◯ 검토 내용

- 터파기 및 파일공사에 의한 토류벽이 설치되고, 파일 등의 변형 및 안전사고 예방을 위해 계측기의 설치가 필요

- 실시설계시 계측기 설치사항이 누락(설계회사 확인)

◯ 검토결과 : 설치 승인

첨부 : ********.끝.

지방환경사무관대우	하병문		슬러지재활용과장	이동신		중랑물재생센터소장	12/15 채희정
협조자
시행	슬러지재활용과-7679	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 차장터 5길(송정동 73)	/
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	hbm4146@seoul.go.kr	/	부분공개(5)