함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(1차) 및 차수별부기금액 변경(2014년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역-단위공사,포장,시설물)

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 【2014년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역(장기계속)】에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)시행 및 차수별 부기금액을 조정코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역-단위공사,포장,시설물

나. 도 급 자 : ㈜신잔토환경 박종혁, 중동환경(주) 이병득

다. 용역기간 : 2014.4.23.~2014.12.31.(총부기기간:2014.4.23.~2015.6.30.)

라. 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,급수공사비,신설공사비

자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비

마. 설계변경사유 : 계약물량 증․감 발생

바. 최대이행예정금액 : 당초 100,000,000원 ⇒ 변경 110,000,000원

사. 차수별 설계변경내역                                         (단위: 원)

구 분	총부기금액		1차수 부기금액 (2014년)		2차수 부기금액 (2015년)		비고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
용역비	169,425,000	169,425,000	158,184,000	102,314,000	11,241,000	67,111,000

따로붙임 : 1. 설계변경 보고서(관련서류) 및 설계변경내역서 1부

2. 설계변경 심의결과서 1부

3. 변경합의서 1부. 끝.

주무관	박용석		급수운영과장	조면행		강서수도사업소장	12/15 이상래
협조자	급수설비팀장	유인행		주무관	김유진		행정관리팀장	김경식
계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-30193	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	3146-3961	/전송	3146-3989	/		/	대시민공개