투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰 및 준공기한 연기 요청(노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본및실시설계)

우리본부에서 시행중인 “노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계”용역과 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약의뢰 및 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

- 용 역 명 : 노원교 연결램프 설치 및 수락고가 확장 기본 및 실시설계

- 용역기간 : 2014. 3.27. ~ 2015. 1.22.

- 도 급 비 : 279,180,000원

- 용 역 사 : 동부엔지니어링(주), ㈜동일기술공사, ㈜정호이앤씨, ㈜피엔지

나. 설계변경 및 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
설계변경	279,180,000	278,190,000	감)990,000	단위:원
준공기한	‘14.3.27 ~ ’15. 1.22	‘14.3.27 ~ ’15. 3.22	증)2개월

다, 설계변경 및 준공기한 연기 사유

- 설계변경 사유 : 지하매설물 확인을 위한 줄파기 연장 감소,

시추조사시 보링 연장 및 토질시험비 증·감 발생 등

- 준공기한 연기 사유 : 주민설명회시 주민건의사항(수락고가차도에 방음벽 설치)  검토에 따른 설계기간 부족

붙 임 : 1. 설계변경 및 준공기한연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 용역계약서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
★주무관	임홍필		토목설계과장	조성만		토목부장	12/15 노우성
협조자	경리과장	허금도		계약2팀장	홍연화
시행	토목부-24892	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문 별관2동	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2589	/전송	02-3708-2599	/	ihp@seoul.go.kr	/	대시민공개