내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	(주)평화엔지니어링 대표이사 권재원 귀하
(경유)
제목	성산대교 성능개선사업 설계용역 설계변경사항 통보

1. 평소 우리시정발전에 협조하여 주시는 귀사에 감사드립니다.

2. 우리시와 계약체결하여 시행중인 『성산대교 성능개선 기본 및 실시설계 용역』과 관련 설계변경 사항을 아래와 같이 통보하오니 계약업무 및 용역추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계 용역

나. 용역기간 : 2013.11.1 ~  2015.4.24

다. 설계변경 내용

(단위 : 천원)

구 분	용 역 비		증 감
	당 초	변 경
전체 용역	2,206,000	2,490,471	증287,471
1차 용역	1,850,000	2,397,000	증547,000

라. 용역기간 변경

ㅇ 전체용역

- 당 초 : 2013.11.1. ~ 2015. 4.24

- 변 경 : 2013.11.1. ~ 2015.10.31

ㅇ 1차용역

- 당 초 : 2013.11.1. ~ 2014.12.31

- 변 경 : 2013.11.1. ~ 2015. 6.30.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김귀용		한강교량팀장	하현석		도로시설과장	12/15 이용심
협조자
시행	도로시설과-21737	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 2동1층	/
전화	02)2133-1673	/전송	02)2133-1078	/	gyong@seoul.go.kr	/	대시민공개