함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	계약변경 의뢰(영등포 1정수지 내부 방식공사)

1. 우리정수센터내 시행중인 『영등포 1정수지 내부 방식공사(2차수)』에 대해 아래와 같이 계약변경(공사기간 연장)의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 영등포 1정수지 내부 방식공사(2차수)

나. 계약업체 : ㈜엘씨엠이엔지 대표 박미애

다. 공사기간 변경(2차수)

- 당초 : 2014.07.25~2014.12.18

- 변경 : 2014.07.25~2015.04.30

라. 계약금액 : 변동없음

마. 공사기간 변경 사유 : 동절기 공사중지(‘14.12.16~’15.04.09) 및 1차수(1정수지)                                       수질검사에 소요된 기간(18일)을 반영한 공사기간 연장

바. 공사기간 변경 귀책 : 영등포아리수정수센터

사. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 기타교체비(수선유지교체비)

따로붙임 : 1. 공사기간 연장 보고(방침) 1부.

2. 공사기간 연장 시행 1부.

3. 합의서(공사기간 연장) 1부.  끝

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김왕주		정수시설과장	현인식		영등포아리수정수센터소장	12/15 임정규
협조자	행정관리과장	안창수
시행	정수시설과-8760	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개