문서번호	도로시설과-21734
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	한강교량팀장	도로시설과장
전봉재	하현석	12/15 이용심

한강교량 수중구조물 점검(청소) 용역 설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

도 로 시 설 과

한강교량 수중구조물 점검(청소) 용역 설계변경(정산) 검토 보고

한강교량 수중구조물 점검(청소) 용역 시행중, 물량 변경이 발생하여 실정 보고후 설계 변경을 시행코자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 한강교량 수중구조물 점검(청소) 용역

○ 대    상 : 올림픽대교외 5개 교량

○ 기    간 : 2014. 4. 9 ~ 2015. 2. 2

○ 용 역 비 : 349,808,000원

○ 내    용 : 우물통 청소 222기, 인력점검 158 Point, 정밀점검 68 Point

○ 용역업체 : ㈜ 그린오션 대표이사 한성숙

□ 추진사항

○ 2014. 4. 9     : 공사계약

○ 2014. 4. ~ 7. : 잠실대교, 올림픽대교 점검 및 청소

○ 2014. 8.       : 기성 준공(준공금 116,880,000)

○ 2014. 9 ~ 11 : 원효대교외 3개 교량 점검 및 청소

□ 보고사항

○ 수심 변화로 우물통 기초별 청소 면적 변경(감액 25.5백만원)

- 50㎡ 초과 ~ 150㎡ 이하 : 당초 113 → 변경 131 (증 18기)

- 150㎡ 초과 ~ 270㎡ 이하 : 당초 39 → 변경 13  (감 26기)

○ 인력점검 변경(증액 6백만원)

- 수중보 인근 잠실대교 인력점검으로 변경 시행(도로시설과-6298, 2014.4.10.)

○ 물량 변경 사항

구 분		당초	변경	증·감		비고
				수량	금액(천원)
계					▾ 21,000
우물통 청소	50㎡ 초과~150㎡ 이하	113	131	증) 18	▴ 22,500
	150㎡ 초과~270㎡ 이하	39	13	감) 26	▾ 48,000
인력점검	잠수장비 미사용	27	0	감) 27	▾ 500
	잠수장비 사용	131	234	증) 103	▴ 6,500
크레인 장비 사용		10	4	감) 6	▾ 1,000

□ 보고자 의견

○ 변경된 물량으로 설계 변경을 시행하여, 정산처리코자 함.

첨 부 : 설계 변경 내역서 1부. 끝.