투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 도로시설물 세척 용역 설계변경(1회-최종) 시행

우리사업소에서 시행중인 2014년 도로시설물 세척용역에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)하여 도로시설물 청결관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 도로시설물 세척 용역(성동)

나. 도 급 자 : 나라오이코스(주)  대표 조남옥

다. 용역기간 : 2014. 04. 21 ~ 2015. 02. 28

라. 계약금액 : 금94,458,300원

마. 변경내용 : 도로시설물별 세척물량 증·감

- 도급비 변경 내역

변 경 전	변 경 후	증·감액
94,458,300원	103,100,000원	증 8,641,700원

바. 예산과목

- 도로시설관리, 도로시설물운영(도시개발특별회계), 도로시설물(터널,복개,지하차도)일상유지보수,                        시설부대비 및 시설비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	이경수		시설보수과장	박춘배		성동도로사업소장	12/15 代홍영두
협조자	관리단속과장	홍영두		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-4659	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	02-2210-1551	/전송	02-2210-1562	/	leesoo@seoul.go.kr	/	대시민공개