문서번호	조경과-2701
결재일자	2013.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
오맹렬	김흔진	이성주	정경효		05/19 안영노
협 조
	총무과장			이경로

『2013년 서울대공원 예방사방 공사』

설계변경 실정사항 검토보고

2013. 5.

서 울 대 공 원

(조경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『2013년 서울대공원 예방 사방공사』

설계변경 실정사항 검토보고

『2013년 서울대공원 예방 사방공사』 와 관련하여, 시공사로부터 설계변경 실정보고 사항이 제출되어 검토하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ				공사개요

공 사 명 : 2013년 서울대공원 예방 사방공사

공사기간 : 2013. 4. 22 ~ 2013. 6. 13.

공사내용 : 토공, 골막이, 기슭막이, 집수정, 수목식재등 부대공 등

도 급 액 : 119,808천원

도 급 자 : (주)지디자인 대표 김원율

Ⅱ				설계변경 실정보고 내용

변경사유

○ 야면석 기슭막이(2,3,4,5호지)

－ 당초 야면석 기슭막이 기초없이 50cm 매립 시공하도록 되어 있으나 집중호우시 빠른 유속으로 인한 기초 침식방지를 위해 콘크리트 기초를 보강 시공코자 함.

○ 야면석 기슭막이 추가 시공

- 외곽순환로변 사토장내 비탈면 토사유실로 인한 사면 붕괴가 발생되고 있으므로 토사유실 방지 및 비탈면 안정을 위하여 기슭막이(H=2.0m)를 설치코자 함.

※ 추가 기슭막이 공사 대상지(동물원 외곽순환로변 사토장)

공사물량 증감내역

○ 야면석 기슭막이 기초       :  당초 0m     → 변경 198m  ( 증 198m )

○ 야면석 기슭막이 추가설치    : 당초 289.2㎡ → 변경 369.2㎡( 증 80㎡ )

○ 레미콘(25-18-8) 관급구매    : 당초 38.52㎡  → 변경 78.52㎡( 증 40㎡ )

소요(증액) 예산 : 15,514천원(시공비 13,284천원, 관급자재비 2,230천원)

Ⅲ				예산확보

예산확보 방안

○ 추가 소요(증액) 예산은 『2013년 서울대공원 예방사방공사』의 낙찰차액 사용하여 처리

구 분	발 주 액	계약금액	낙찰차액	비고
금 액(천원)	137,504	119,808	17,696

예산과목

○ 푸른도시국 산지방재과 산림안전관리, 산림재해방지, 사방사업, 시설비

○ 푸른도시국 산지방재과 산림안전관리, 산림재해방지, 산림내위험시설정비, 시설비

Ⅳ				조치계획

우기전 공사완료 추진 등 촉박한 공기와 연계공종 시공지연 방지 등 현장여건을 고려하여, 위 변경사항에 대해 우선 시공토록 조치하고 추후 설계변경시 내역에 반영처리.

레미콘 관급자재 물량 증가분에 대해서는 공사시행에 차질이 발생하지 않도록 추가 조달구매하고 준공시 정산처리 코자 함. 끝.