문서번호	시설보수과-4653
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장	성동도로사업소장
이경수	최태석	박춘배	12/15 代홍영두
협 조

『2014년 도로시설물 세척용역』 설계변경 검토 보고

2014. 12

성동도로사업소

(시설보수과)

『2014년 도로시설물 세척용역』 설계변경 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중에 있는 『2014년 도로시설물 세척 용역』의 세척물량 변경

및 작업 변경사항에 따른 설계변경을 시행하여 세척수행에 만전을 기하고자 함.

1		용 역 개 요

용 역 명 : 『2014 도로시설물 세척 용역』

용역기간 : 2014년 4월 21일  ~ 2015년 2월 28일

용역 개요 : 세척 대상 시설물 : 18개소

- 1종시설물 : 일반교량 2개소, 고가차도 1개소

- 2종 및 법정외 : 일반교량 4개소, 터널 3개소, 지하차도 8개소

도 급 액 : 94,458,300천원

도 급 자 : 나라오이코스(주)  대표 조남옥

2		보 고 내 용

설계변경 사유

○ 시설물별 세척회수 및 세척물량 변동

- 관련 : 2014년도로시설물 세척용역 추진계획 변경(시설보수과-3794[2014.10.2.])

○ 변경사항

연 번	시설물명	세척횟수(회)		세척면적(㎡)
		당초	변경	당초	변경
계	18개 도로시설물	42	45	77,030	87,563
1	워커힐고가	2	2	13,396	13,396
2	황학교	3	2	4,554	3,036
3	무학교	3	3	3,753	3,753
4	두물다리(청)	3	2	1,128	752
5	고산자교	3	2	1,389	926
6	비우당교	3	3	831	831
7	이화교	3	3	11,064	11,064
8	금호터널	2	2	6,564	6,564
9	옥수터널	2	2	3,448	3,448

연 번	시설물명	세척횟수(회)		세척면적(㎡)
		당초	변경	당초	변경
10	무지개터널	2	3	3,609	5,815
11	동일로지하차도	2	1	2,110	1,055
12	능산지하차도	2	3	5,786	8,405
13	신내 지하차도	2	3	4,124	7,333
14	신답 지하차도	2	3	5,218	7,581
15	성동 지하차도	2	2	2,672	2,528
16	응봉 지하차도	2	3	4,200	6,300
17	서울숲1 지하차도	2	3	1,304	1,956
18	서울숲2 지하차도	2	3	1,880	2,820

○ 용역비 변경 사항

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	비 고
총 용 역 비		94,458,300	103,100,000	증 8,641,700
도급비	공 급 가 액	85,871,182	93,727,273	증 7,856,091
	부 가 가 치 세	8,587,118	9,372,727	증 785,609
	도 급 비	94,458,300	103,100,000	증 8,641,700

예산과목

○ 도로시설관리, 도로시설물운영(도시개발특별회계),  도로시설물(터널,복개,지하차도) 일상유지보수,             시설비 및 부대비, 시설비

3		향 후 계 획

상기 내용과 같이 세척물량 증감에 따라  『2014년 도로시설물 세척 용역』을 설계변경 후          용역 준공코자 함.

첨  부 : 1. 설계변경내역서 1부.  끝.