문서번호	건축부-15106
결재일자	2014.12.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
김희태		곽동호	12/15 김우성
협 조

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

건축분야 실정보고 검토

2014. 12.

「중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업」

건축분야 실정보고 검토

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업』의 건축분야 중 재사용플라자사업과의 연계 검토중인 하수도과학관공사, 토목구조물 설계변경에 따른 계단실 공사의 계약변경사항에 대한 실정보고를 검토 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

○ 위    치 : 성동구 차장터5길 10 (송정동 73)

○ 공사규모

- 토목 : 25만㎥/일 시설현대화, 78만㎥/일 고도처리사업

- 건축 : 하수도과학관(2,365.03㎡), 설비동(673.84㎡) 등 신축

○ 공사기간 : 2009. 2. 13. ～ (9차계약,＇15.2.28.까지)

○ 시 공 사 : 지에스건설(주) 외 3개사

○ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

□ 추진경위

○ 2014.08.08 : 중랑 현대화사업 및 재사용플라자 건립관련 회의 1차

- 물재생시설과-9954(2014.8.5.)호

○ 2014.09.19 : 중랑 현대화사업 및 재사용플라자 건립관련 회의 2차

- 물재생시설과-11723(2014.9.17.)호

○ 2014.09.30 : 중랑 현대화사업 및 재사용플라자 건립관련 회의 3차

- 물재생시설과-12237(2014.9.26.)호

○ 2014.12.11 : 하수도과학관외 공사내용 조정(9차)관련 실정보고

- 한종(중랑)감 제14-301호

□ 실정보고 내용

○ 하수도과학관 공사 차수 이월 조정

- 재사용플라자 사업과의 연계를 고려

- 커튼월, 창호, 방수공사 등 내외장 공사 차수 이월

○ 계단실-1, -2 공사 차수 이월 조정

- 지하 토목구조물 설계변경에 따른 계단실 공사 차수 이월

○ 9차분에서 차수변경이 필요한 금액 검토

구분	당초금액	변경금액	차수이월금액	비 고
하수도과학관	*************	*************	***************	********
설비동	***********	***********	*	****
기타(계단실)	**********	**********	************	***********
소 계	*************	*************	***************
간접비	*************	*************	*************
합 계	*************	*************	***************

□ 건설사업관리단 검토 의견

○ 재사용플라자사업의 준공시기를 고려하여 하수도과학관 건축마감공사 일부와 총인처리시설과 연계된 건축공사내역을 차수이월조정함이 적정하다 판단되며

○ 총인처리시설 설계변경 자문위원회 진행중에 있으므로 차후 설계변경 시 설비동 변경부분을 반영하여 전체와 9차분을 조정할 예정

□ 처리의견

○ 건설사업관리단의 실정보고된 의견과 같이 설계변경 처리토록 방재시설부에 통보코자함.

붙 임 : 실정보고서 1부.  끝.