투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(3회)_2014년 도로파손 긴급복구 공사(연간단가)

우리사업소에서 시행중인 「2014년 도로파손 긴급복구 공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 도로파손 긴급복구 공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 2. 28.

다. 도 급 자 : (주)유봉건설  대표 강창순

라. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	1,625,311,000	2,185,311,000	증 560,000,000
도 급 비	1,050,995,000	1,364,101,000	증 313,106,000
관 급 비	574,316,000	821,210,000	증 246,894,000

마. 변경사유 : 물량 증․감 및 추가예산 반영에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 설계변경(정산) 내역서 1부.

2. 설계변경 방침서 1부.  끝.

주무관	한수영		도로보수과장	김승태		남부도로사업소장	12/15 민승기
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-6909	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145(대림동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-3284-5450	/전송	02-842-1634	/	hank62@seoul.go.kr	/	대시민공개