문서번호	정수시설과-8730
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		현인식	12/15 임정규
협조
	행정관리과장		안창수

기계설비 유지보수 공사(연간단가) 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

영등포아리수정수센터

정수시설과

『기계설비 유지보수 공사』설계변경 보고

우리 정수센터 기계설비 유지보수공사(연간단가) 시행중 설계변경 사항이 발생하여 설계변경을 시행하고자 보고함.

개요

◯ 공 사 명 : 기계설비 유지보수 공사(연간단가)

◯ 공사기간 : 2014. 04. 07. ～ 12. 20.

◯ 공사금액 : 금58,388,380원

◯ 시공업체 : 남영이엔지(주) 대표 최병국

◯ 변경내용 : 별첨 “설계내역서” 참조

◯ 설계변경 관련근거

- 지방자치단체 공사계약일반조건 제4장(행정안전부예규 제253호)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장8절,13장6절(행정안전부예규 제34호)

설계변경 사항

◯ 신규공정 발생 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경

- 2정수장 여과지 유출밸브 엑츄에이터 수리(작업지시 1차분)

- 소화약제 충전 및 자동확산 소화기 설치(작업지시 2차분)

․ 소방종합정밀점검 결과 지적사항 조치

- 2정수장 표면세척수 배관 신축관 교체(작업지시 2차분)

- 2정수장 배오존파괴설비 블로워모터 수리(작업지시 3차분)

- 취수장 진공펌프 및 2정수장 슬러지인발펌프 수리(작업지시 4차분)

- 2정수장 오존접촉지 배오존처리시설 배관정비(작업지시 5차분)

- 1정수장 응집지 패들축 및 키 교체(작업지시 6차분)

- 태양열온수기 배관누수로 교체(작업지시 6차분)

- 2정수장 표면세척수배관 플랜지 누수부위 재결합 및 패킹교체(작업지시 6차분)

- 물량증감내역 : “설계변경내역서” 참조

◯ 건강 및 연금보험료, 노인장기요양보험료 삭감

- 국민연금법(제3조) 및 국민건강보험법(제45조)에 의거 시공사측에서 납부한 사실이 없기에 삭감처리

◯ 환경보전비 삭감

- 환경보전비 미사용에 따른 삭감

◯ 공사비 증감 내역

구 분	재 료 비	노 무 비	경 비	재 경 비	공사원가	부가가치세	총 공 사 비
변 경 전	18,475,990	20,109,862	95,618	14,398,876	53,080,346	5,308,034	58,388,380
변 경 후	24,306,622	16,247,144	2,018	11,973,216	52,529,000	5,252,900	57,781,900
증 감 액	증 5,830,632	감 3,862,718	감 93,600	감 2,425,660	감 551,346	감 55,134	감 606,480

조치계획

◯ 변경된 설계내용에 따라 건설공사 설계변경 심의 및 기성준공 처리절차 운영계획에 의거 설계변경 심의위원회를 개최하여 처리하고자 합니다.

첨부 : 1. 설계변경 내역서 1부

2. 제비율 검증서 1부. 끝.