문서번호	토목부-24883
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
최진우		김영수	12/15 노우성
협조

Kick Off Meeting 결과 보고

《 월드컵대교 건설공사 》

2014.12.

도시기반시설본부

( 토  목  부 )

Kick Off Meeting 결과 보고

《 월드컵대교 건설공사 》

월드컵대교 교량상부공 사장교 구간 구조물 가설 및 공용중 안정성 검토결과 및 원설계 문제점에 대하여 개선방안을 수립코자 Kick Off Meeting을 실시한 결과 보고임

공사현황

❍ 공사규모 : 폭 31.4m(6차로), 연장 1,980m

❍ 공사기간 : 2010. 3. 22 ~ 2015. 8. 22

❍ 공 사 비 : 176,063백만원

❍ 시 공 사 : 삼성물산(주) 외 2개사

❍ 감 리 단 : (주)포스코엔지니어링 외 1개사

Kick Off Meeting 개최

❍ 일 시 : 2014.12. 8. (월) 15:00

❍ 장 소 : 현장사무실

❍ 참석자

- 원설계사

․ 유신 전무 정공래 (토목구조), 이사 김기혁 (토목구조)

․ 삼보기술단 상무 현창효 (토목구조)

- 감리단

․ 포스코엔지니어링 이사 박래영 (토목구조) : 기술지원감리원

- 기  타

․ 책임감리원, 현장대리인, 공사관리관등

․ 하도급사 VSL코리아 , 용역사 코비코리아등

회의결과

❍ 주두부 가시설(P11)

- 주두부 가시설이 동바리로 설계되어 있으나 일부 수량이 누락되어 시공이 어려운 실정이며 가시설은 Bracket+Bent 공법이 가장 합리적이며 증액금액은 5억원 미만으로 검토

❍ 가설중 내풍 안정성

- 가설시 설계풍속이 2005년 개정이 되어(비초과확률 60%→80%) 가설시 주탑 안정성에 대하여 추가 구조검토가 필요함

- 사장교 전문가가 포함된 기술자문회의를 개최하여 풍속기준 결정

❍ 콘크리트 보강형 거더 횡방향 단면검토

- 구조계산결과 일부 철근량이 부족한 것으로 보이나 원설계사에서 보완설계를 실시하여 대책방안 수립하여 제출

❍ 주탑부 안정성 검토

- 가설단계 및 완성단계 주탑부 구조해석결과 일부 균열 발생이 예상되는바 원설계사에서 구조안정성 등 추가 검토를 실시하여 차기 기술자문회의시 대책방안을 수립, 제출

향후계획

❍ Kick Off Meeting 결과 지적사항에 대하여 원설계자(유신)에서 구조계산 등 재검토하여 개선 및 대책방안 제출

❍ 사장교 전문가가 포함된 기술자문회의를 개최하여 상기 4건에 대하여 정밀검토하여 사장교 주탑 가설시 안전사고 예방에 만전을 기하고자함

붙  임 : 관련자료 및 회의록 각 1부.  끝.