투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행

1. 시설관리공단 공사감독2처 – 21480(2014.12.12)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 발주하여 시설관리공단에서 감독업무 위탁수행중인 북악터널내부 보수보강 공사에 대한 설계변경(1차)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가 공 사 명 : 북악터널 내부 보수보강 공사

나. 공사개요 : 배수로정비811m, 단면보수 665㎡, 표면보수 7,185㎡,

신축이음보수 1,827㎡, 포장표층개량 161a, 기타 1식.

다. 공사기간 : 2014. 05. 22. ~ 2016. 2. 21.(1차 2014.12.31)

라. 도 급 비 : 2,677,190천원 (1차 1,260,050천원)

마. 도 급 자 : 개경건설(주) 대표 이윤복

바. 변경사유 : 물량 증․감

사. 변경내역                                                 (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
총 공 사 비		1,290,000,600	1,290,000,000
도급비	공급가액	1,145,500,000	1,156,216,210	증) 10,716,210
	부가세	114,550,000	115,621,620	증) 1,071,620
	계	1,260,050,000	1,271,837,830	증) 11,787,830
관 급 비		29,401,550	18,162,170	감) 11,239,380
이 전 비		548,450	-	감) 548,450

사. 예산과목 : 도시개발특별회계,도시안전실,도시안전실도로시설과,도로시  설관리,터널시설관리,북악터널내부보수보강공사,시설비

첨  부 : 설계변경 관련서류 1부. 끝.

★주무관	김발현		시설보수과장	정재현		북부도로사업소장	12/15 이승진
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-8940	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5460	/전송	945-5073	/	kbh04099@seoul.go.kr	/	대시민공개