문서번호	방재시설부-13342
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이정국		서관석	12/15 임춘근
협조
	주무관		임병길

“탄천물재생센타 복개공원화(4단계) 공사”

타워크레인(D구간) 장비 조립장 및 가설휀스 설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

도시기반시설본부

방재시설부

타워크레인(D구간) 장비 조립장 및 가설훼스 설치 검토보고

복개(PC 가설)를 위한 타워크레인 장비 임시 작업장(조립 및 해체) 확보 및 가설휀스 설치 변경(형식변경)에 대한 검토 보고임

□ 관련근거

○ 탄천감14-241호(2014.12.2)

- 타워크레인(D구간) 장비 조립장 및 가설휀스 설치 관련 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 탄천물재생센타 복개공원화(4단계) 공사

○ 공사규모 : PC복개 총면적 33,978㎡, 공원화 및 친화시설 1식

○ 공사기간 : 2013. 10. 01. ~ 2016. 9. 29

○ 도 급 비 : 26,154백만원

○ 시 공 사 : 웅진개발(주)외 1

○ 감 리 사 : ㈜유신 외 1

□ 보고내용

○ 타워크레인 설치(D구간) 및 가설휀스 설계현황

가설휀스(비계식) L=242m, H=6m

가설휀스(H-Beam식)

L=230m, H=6m

수

림

대

○ 타워크레인 설치(D구간) 임시 작업장 확보 및 가설휀스 설치 변경

타워크레인

설치 및 해체 작업장

○ 주요 수량 증ㆍ감 현황

공종		단위	수 량			공사비(천원)			비 고
			당초	변경	증ㆍ감	당초	변경	증ㆍ감
타워크레인 설치 (작업장 설치 및 복구)		식	-	1	증) 1	-	27,018	증) 27,018	타워크레인 조림 및 해체
가설휀스	비계식 (H=6m→4m)	m	242	229	감) 13	34,239	32,424	감) 1,815
	Beam식 (H=6m)	m	230	-	감)230	114,817	-	감)114,817
	Anchor식 (H=4m)	m	-	170	증)170	-	36,548	증) 36,548
	RPP방음 (H=6m)	m	-	72	증) 72	-	43,086	증) 43,086	타워크레인 작업장 소음방지
	소계		472	471	감) 1	149,056	112,058	감) 36,998
홀딩도어		㎡	8	48	증) 40	874	5,244	증) 4,370
계						149,930	144,320	감) 5,610

○ 공사비 증ㆍ감 현황

(단위 : 천원)

구 분	금 액		증ㆍ감	비 고
	당 초	변경
도 급 비	149,930	144,320	감) 5,610
관 급 비	-	1,012	증) 1,012
총공사비	149,930	145,332	감) 4,598

○ 책임감리원 검토의견

- 타워크레인 장비 조립 및 해체를 위한 임시 작업장 확보(사용후 원상복구) 및 도로시설물(보도블럭 등)의 철거 및 복구,

- 비산먼지, 방음, 공사현장 차폐 목적으로 설치되는 가설휀스는 유관기관(강남구청)과의 협의 및 현장여건를 고려한 설치로 시행함이 타당.

□ 조치의견

상기 책임감리원 보고내용과 같이 타워크레인 설치(D구간)를 위한 장비 임시 작업장(조립 및 해체) 확보 및 가설휀스 설치 조정(변경)은 현장 여건상 불가피한 사항으로 우선 개선 시공토록 조치하고 추후 설계 변경시 반영토록 승인함이 타당함.

첨부 : 책임감리원 검토의견서 1 부. 끝.