함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰

1. 우리 본부에서 시행하는  『2014년 페루 찬차마요시 산라몬정수장 시설개선사업(ODA)』 과 관련하여 준공기한을 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약내용

○ 계약건명   : 2014년 페루 찬차마요시 산라몬정수장 시설개선사업(ODA)

○ 계약업체(PMC) : ㈜한국종합기술 대표 이강록

○ 계약금액   : 일금 삼억이천일십만원정(￦320,100,000)

○ 계약년월일 : 2014. 05. 30

○ 착공년월일 : 2014. 06. 09

○ 준공기한   : 2014. 12. 31

나. 준공기한 연기 내용

○ 준공기한 연기 : 2015. 2. 28

○ 연기 사유 귀책소재 : 업체에 책임이 없음

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유

- 페루 지방선거에 따른 후닌주, 찬차마요시 행정절차 지연

- 시공을 위한 상수도 국산자재 페루 반입 시 무관세 통관을 위한 처리절차가

복잡하여 많은 시간 소요

- 공사기간 중 우기(’14.11월 ~ ’15.2월)로 인한 공사진행이 지연

첨 부 : 준공기한 연기보고서 및 사유서 각 1부.  끝.

	대외협력과장
주무관	이경선		대외협력과장	12/15 김인철
협조자
시행	대외협력과-7136	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1207	/전송	02-3146-1208	/	gslee3@seoul.go.kr	/	대시민공개