문서번호	시설보수과-8914
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김발현		정재현	12/15 이승진
협조

북악터널내부 보수보강공사 실정보고(검토)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

북부도로사업소

(시설보수과)

북악터널내부 보수보강 공사 실정보고(검토)

공사현황

공 사 명 : 북악터널 내부 보수보강 공사

공사개요 : 배수로정비811m, 단면보수 665㎡, 표면보수 7,185㎡,

신축이음보수 1,827㎡, 포장표층개량 161a, 기타 1식.

공사기간 : 2014. 05. 22. ~ 2016. 2. 21.(1차 2014.12.31)

도 급 비 : 2,677,190천원 (1차 1,260,050천원)

도 급 자 : 개경건설(주) 대표 이윤복

감 독 처 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독2처

공단 보고내용

변경내용(1차 계약건)

‣ 서울시 시설관리공단 공사감독2처-21480호(2014.12.12.) 관련.

‣ 공사 실정보고에 의한 단순물량 변경 및 기타 실측 수량 증·감에 의한            공사금액 변경

증·감 내역                                                (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	1,290,000,000	1,290,000,000	-
도 급 비	1,260,050,000	1,271,837,830	증) 11,787,830
관 급 비	29,401,550	18,162,170	감) 11,239,380
이 전 비	548,450	-	감) 548,450

검토 및 조치의견

공사실정 보고 물량 증·감 및 실공사 실측에 의한 정산 보고사항에 대하여           승인 및 설계변경코자 합니다.

붙임 : 공단 설계변경보고서 등 관련문서 1부