투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(제1회)- 2014 도로시설물보수공사 건설폐기물처리용역

우리 사업소에서 시행중인 도로시설물 보수공사와 관련『2014년 관내 도로시설물보수공사 폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1회) 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 도로시설물 보수공사 폐기물 처리용역

나. 용역개요 : 폐기물운반(5,207톤), 폐기물처리(1,881톤)

다. 용역기간 : 2014. 5. 14 ~ 2015. 2.28

라. 계약금액 : 79,688,000원(일금칠천구백육십팔만팔천원정)

마. 도 급 자 : ㈜ 방태 대표 김용남

바. 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․감		비 고
총용역비		79,688,000	54,975,500	감	24,712,500
도급비	순용역비	72,443,637	49,977,728	감	22,465,909
	부가가치세	7,244,363	4,997,772	감	2,246,591
	계	79,688,000	54,975,500	감	24,712,500

사. 예산과목

- 도로시설과, 고가차도및 입체교차로관리, 개봉고가보수공사,시설비

- 도로시설과, 일반교량관리,여의2교보수공사,시설비 및 부대비,시설비

- 도로시설과, 고가차도및 입체교차로관리, 가리봉철도고가 보수공사,                 시설비 및 부대비, 시설비

- 도로시설과,일반교량관리, 양화교보수공사, 시설비및부대비, 시설비

- 도로시설과, 터널 및 복개관리, 화곡터널보수공사,시설비 및 부대비,                  시설비

- 도로시설과, 터널 및 복개관리, 공항입구지하차도공사, 시설비 및

부대비, 시설비

- 도로시설과, 도로시설물(교량)일상유지보수공사, 시설비 및 부대비,

시설비

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝

주무관	전재형		시설보수과장	김권일		강서도로사업소장	12/15 조병준
협조자	관리단속과장	이은엽		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-9988	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237 (마곡동 67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	(02)2657-7970	/		/	대시민공개