문서번호	토목부-24870
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
손준호		권혁대	12/15 노우성
협조

감리용역 준공기한 연기 검토보고

(용비교~행당중간 도로개설공사 전면책임감리용역)

2014.12.

도시기반시설본부

(토  목  부)

감리용역 준공기한 연기 검토보고

(용비교 행당중간 도로개설공사 전면책임감리용역)

『용비교 행당중간 도로개설공사 전면책임감리용역(7차)』의 준공기한이 임박하여, 감리용역의 연속성을 유지하기 위한 준공기한 연기 검토 보고임.

□ 용역개요

ㅇ 규    모 : 도로확장 및 개설 L=719m, B=확장5.2m(전체 26.4m)

(교량 520m, 토공 199m)

ㅇ 용역기간 : 총괄 ‘07.01.10 ~ ’15.1.31,  7차 ‘14.01.30 ~ ’14.12.31

ㅇ 용 역 비 : 총괄 2,310,140천원,      7차 354,000천원

ㅇ 용 역 사 : ㈜평화엔지니어링외 1개사

□ 보고내용

ㅇ 본 공사의 책임감리용역은 ‘14.12.31.로 준공토록 되어 있으나

ㅇ 책임감리용역(8차) 발주시까지 책임감리용역의 연속성을 유지하기 위해 책임감리용역(7차)의 준공기한 연기가 불가피함.

□ 문 제 점

ㅇ 준공기한 연기시 ‘14년 책임용역감리비가 부족한 실정임.

□ 조치계획

ㅇ 책임감리용역의 연속성을 유지하기 위해 책임감리용역(7차) 준공기한을 연기하고자하며.

ㅇ 부족한 소요예산은 추후 설계변경시 ‘15년 예산으로 반영하고자함

(단위:천원)

기간	용역기간		용역금액
	당 초	변 경	당 초	변 경	증·감
7 차	‘14.01.30~‘14.12.31	‘14.01.30~’15.01.31	354,000	391,600	증)37,600

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.