문서번호	목동사업과-11441
결재일자	2014.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	목동사업과장	체육시설관리사업소장
박관호	이경재	代정남영	12/16 박준양
협 조
	경영기획팀장		송재호
	주무관		권수식
	목동운동장관리팀장		정남영

『목동빙상장 공조(제습)설비 개선공사』계획

2014. 12.

서울특별시 체육시설관리사업소 목동사업과

목동빙상장 공조(제습)설비 개선공사계획

개장후 25년 경과된 목동빙상장의 시설노후로 링크내 연무 및 결로현상이 자주 발생되어, 원인 분석 및 공조(제습)설비 개선 설계용역을 완료한 바, 그 결과에 따른 공조설비 개선공사를 시행하여 쾌적한 관람환경 조성과 시설보호에 만전을 기하고자 함

Ⅰ

추 진 근 거

“목동빙상장 공조(제습)설비 개선공사 계약심사결과 통보”

⇨ [계약심사과-16473호(2014.11.07.)]

“목동종합운동장 2014년 부진사업 추진계획”

⇨ [목동사업과-11313호(2014.12.11.)]

Ⅱ

공조(제습)설비 개선공사 개요

사업개요

◈ 목동빙상장 노후 공조덕트 및 로우터 개선

◈ 목동빙상장 공기순환휀, 하이브리드제습기 장비설치(관급공사)

◈ 목동빙상장 공조(제습)설비 전기간선 설비 설치

계약심사 결과에 따른 공사비 : 473,413천원

◈ 도급 공사비 : 294,301천원(공조덕트 및 로우터 개선공사)

◈ 관급 공사비 : 157,112천원(공기순환휀, 하이브리드제습기 설치)

공조(제습)설비 개선관련 추진사항

◈ 설계심사 결과 총공사비가 451,413천원으로 당초 사업비(350,000천원) 이외 부족분(101,413천원)을 국고교부금(2014 체육진흥투표권 수익금)으로 사용코자 하였으나, 형편상 “2014/2015 ISU 쇼트트랙 제4차 월드컵 서울대회”를 대비하여 빙상장 노후전광판 개선에 본 예산을 우선투입한 결과 예산부족 발생

◈ 목동빙상장 공조덕트 및 로우터 개선을 위해 우선 도급공사 실시하고, 공기순환휀 하이브리드제습기(관급) 설치공사는 추후 예산확보 및 빙상장 안개현상 개선여부 등 검토후 별도공사 추진

Ⅲ

빙상장 공조(제습)설비 개선공사 추진계획

공조(제습)설비 성능개선 공사비

◈ 도급 공사비 : 294,301천원(공조덕트 및 로우터 개선 공사)

◈ 관급 공사비 : 157,112천원(공기순환휀, 하이브리드제습기 설치)

◈ 공조(제습)설비 전기간선공사 : 약 금22백만원(소액 별도 발주)

◈ 소요되는 총공사비(473,413천원)는 2014체육진흥투표권 수익금 사용

입찰자격

◈ 건설산업기본법 제8조 및 시행령 제7조에 의한 기계설비공사업 면허를 소지한 업체로서 입찰공고일 전일 현재 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 소재한 업체(※ 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 본 자격은 계속 유지되어야 함)

◈ 지방계약법 제9조, 시행령 제20조2에 의한 목동빙상장 기존 설치 장비 용량(17,000CMH이상)의 제습풍량의 제습기 설치 공사실적을 입찰서 제출마감일 전일까지 제출 가능한 업체

개선공사 추진 일정

◈ 2015. 01월   : 공조설비 개선공사 시행(발주, 입찰공고)

◈ 2015. 02월   : 계약 및 공사 착공

◈ 2015. 2 ~ 3월 : 공조설비 전기간선공사 착수(별도공사 발주)

◈ 2015. 04월   : 공사 준공

◈ 2015. 2 ~ 5월 : 빙상장 외벽창호 성능개선공사(건축분야) 시행

덧붙임 : ① 목동빙상장 공조(제습)설비 개선공사 계약심사결과  1부

② 목동종합운동장 2014년 부진사업 추진계획         1부. 끝.