투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(제2염곡지하차도관련 횡배수암거 및 보도테크 설계변경시행)

1.업무지시현장 :  강남순환도시고속도로 건설(8공구) 롯데건설(주), 강남순환도시고속도로 건설(8공구) (주)동명기술공단종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2014-12-15 00:12:00

3.지 시 내 용:

가. 동기강 2014-304호(2014.11.6.) 제2염곡지하차도 관련 조립식 PC 암거변경 및 보도테크 설치 실정보고와 관련입니다.

나. 제2염곡지하차도 설치를 위한 서울시 포장공법(한국형 도로포장 설계법)으로 검토한 U-TYPE 구간 이설 설치할 횡배수암거 형식 및 가시설은 실정보고와 같이 변경 시행하고

다. 보도확보를 위한 구조물(옹벽)과 가시설 합벽시공은 보행자 통행로를 차단하게 되는바 보도테크를 설치하여 보행자통행로를 확보토록 설계변경 반영하여주시기 바랍니다.

첨부 : 제2염곡지하차도관련 실정보고검토 방침 1부.  끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							양준식			주무관					김구					도시고속도로과장					12/16 명경출
협조자
시행			토목부-24974									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울시 중구 덕수궁길 15(서소문동 서소문청사2동) 도시기반시설본부 3층 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-8666						/전송			02-3708-2599					/	*********@seoul.go.kr												/	대시민공개