투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(3회)- 2014 관내도로시설물 일상유지보수공사

우리 사업소에서 2014년 예산 사업으로 추진중인 『2014 관내 도로시설물일상유지보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014 관내 도로시설물 일상유지보수공사

나. 공사개요 : 신축이음교체(281m), 균열보수(258m), 단면보수(800㎡),

표면처리(433㎡), 교면방수 및 포장(100a)

다. 공사기간 : 2014. 4. 8 ~ 2015. 2. 28

라. 계약금액 : 1,460,921,000원

마. 도 급 자 : 종정종합건설㈜ 대표 방은혜

바. 변경내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비고
총 공사비	1,740,921,000	1,740,921,000	변동없음
도 급 비	1,460,921,000	1,555,921,000	증 95,000,000
관 급 비	200,000,000	147,980,000	감 52,020,000
이 전 비	80,000,000	37,020,000	감 42,980,000

사. 변경사유 : 관급비 및 이전비 변경에 따른 설계 변경

신규공종 및 기타 보수물량 증감에 따른 계약물량 변경

아. 예산과목 : 1) 도시안전실 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물

운영,도로시설물(터널,복개)일상유지보수,시설비

2) 도시안전실 도로시설과, 교량관리, 교량시설물 운영,

도로시설물(교량)일상유지보수,시설비

붙  임 : 1. 설계변경보고서(3회)

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

주무관	전재형		시설보수과장	김권일		강서도로사업소장	12/16 조병준
협조자	관리단속과장	이은엽		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-10055	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237 (마곡동 67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2657-7974	/전송	(02)2657-7970	/		/	대시민공개