투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(한강공원 나들목 증설공사(옥수, 낙천정) 전면책임감리용역-2차 1회

우리 본부에서 추진중인 『한강공원 나들목 증설공사(옥수, 낙천정)전면책임감리용역 2차』에 대하여 아래와 같이 설계변경 1회 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(옥수, 낙천정) 전면책임감리용역 2차

나. 계약기간 : 2014. 2.16 ∼ 2015. 2.15

다. 계약금액 : ￦327,000,000원

마. 감 리 사 : ㈜케이알티씨, ㈜서영엔지니어링

바. 변경금액

구 분	2차사업			비고 (단위:원)
	당 초	변 경	증·감
계약금액	327,000,000	340,000,000	증) 13,000,000

사. 설계변경사유

- 한강공원 나들목 증설공사 디자인 자문비 물량조정에 따른 금액변경

아. 예산과목 (2차:14년 예산)

- 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선, 한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 감리비(100-401-02)

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 도서 1부. 끝.

주무관	김동식		치수과장	김용제		시설부장	12/16 차광재
협조자	주무관	최승룡		주무관	장보금		총무과장	최대봉
시행	치수과-4427	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개