문서번호	녹색에너지과-10131
결재일자	2013.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	에너지효율화팀장	녹색에너지과장	기후변화정책관
김형집	장만수	권민	05/27 김용복

2013년 시립사회복지시설 BRP 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 5

기후환경본부

【녹색에너지과】

2013년 시립사회복지시설 BRP 추진계획

시민고객이 많이 이용하는 시 소유 사회복지시설에 대한 2013년 건물에너지효율화사업(BRP)을 추진 에너지효율향상 및 에너지 절감을 극대화하고자 함

※ 본부장 방침『건물에너지효율화사업 실행계획』(녹색에너지과-3296호, '12.2.29)관련임

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 공공부문 건물에너지효율화사업(BRP)

○ 사업대상 : 노인복지관 등 시립사회복지시설 14개소

- 에너지진단을 통해 단열, 냉난방시스템 교체 등 시설개선을 통해 에너지효율 제고

○ 사업기간 : 2013. 6월 ~ 11월

○ 사업예산 : 3,360백만원(시설비)

□ 사업목표

○ 에너지절감률은 전년대비 10%이상으로 하되, 시설여건에 따라 조정

○ 에너지비용 절감으로 인한 운영비 감소분은 복지관 운영수준 향상

○ 『원전하나줄이기』 공공부문 선도적인 에너지절약 사업 추진으로

사회적 공감대 조성

□ 추진 경과

○ 2011년 : 15개소(사업비 34.2억, 신목종합사회복지관 외 14개소)

○ 2012년 : 15개소(사업비 36억, 강동노인복지관 외 14개소)

○ 2013년 : 14개소(사업비 33.6억, 강북노인복지관 외 13개소)

- 2013. 4. 23 : 선정위원회 심의

- 2013. 5. 16 : 사회복지시설 시설물 담당자 및 자치구 담당자 회의

□ 대상 선정

○ 대상선정 : 복지시설의 건물BRP 사업계획서 검토 및 사업의 시급성,

효과등 외부전문가 자문후 결정

○ 예산배정 : 에너지진단 비용 및 BRP 사업 예산(시설개선비용)은 단위면적(㎡)당 63,000원을 기준으로 배정

○ 선정결과 : “세부내역 별첨”

(단위:백만원)

복 지 관	배정예산	복 지 관	배정예산	복 지 관	배정예산
강북노인	180	뇌성마비	200	망우청소년	350
금천노인	180	상이군경	180	직업체험	370
동작노인	140	서대문농아인	90	청소년성문화	70
용산노인	210	지적장애인	120	서울유스텔	520
남부장애인	360	문래청소년	390

□ 추진 방법

○ 건물에너지진단 용역 결과에 따라 시설개선 항목 선정

○ 시설개선공사 계약방법 : 자치구 실정에 적합한 계약방법 적용

- 에너지진단 용역 결과에 따른 세부 실시설계후 일반공사 발주

(일반공사로 발주하더라도 성과보증방식(보증기간 : 2년)은 적용)

- ESCO사업자와 성과보증방식으로 “협상에 의한 계약” 추진

․ BRP사업 입찰참가 자격은 「에너지이용 합리화법」 제25조        규정에 의거 에너지절약전문기업(ESCO, 1종)으로 하고 계약

방식은 협상에 의한 “성과보증계약” 적용(보증기간 : 2년이상)

○ 참여업체 자격(업체선정 및 입찰참가자격) : 각 개별법에 의한 면허를 소지한 업체

□ 추진 절차

사업계획 수 립		사업비 (재)배정		건 물 에너지진단		시설개선 발 주		절감량 측정 사후관리
□녹색에너지과		□녹색에너지과		□자치구		□자치구 (복지시설 협조)		□복지시설 (자치구 협조)

□ 추진 일정

○ 2012.  5월            사회복지시설 BRP추진계획 수립 및 대상선정

○ 2012.  6월 ～  7월   사업대상  건물에너지진단용역 실시

○ 2012.  7월 ～ 11월   실시설계용역 및 시설개선공사 추진

○ 2012. 12월  사업성과 분석

□ 행정 사항

○ 시립사회복지시설 BRP사업은 복지시설 소재지 자치구에서 추진

- 추진근거 : 복지정책과-16272호(`09. 6. 24)

『사회복지시설 기능보강사업 공통 업무 처리 지침』

○ 협상에 의한 계약 추진시 “제안서 평가위원회”는 관련 전문가로 구성된

시 평가위원 인력풀 활용

○ 금년도 사업대상 시설중 해당시설 또는 자치구 사정등으로 사업추진

곤란시(또는 사업비 반납) 예비순번 순으로 사업비 (재)배정 및 사업

추진

○ 원활한 사업추진을 위해 자치구별 진행상황 지속관리, 기술자문 및 업

무지도

별첨 1) 2013년 사회복지시설 BRP 사업비 (재)배정 내역 1부.  끝