문서번호	시설개선과-9916
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
오상호		신동호	12/16 박준양
협 조
	주무관			우인식

『2014년 시설물유지보수공사(연간단가계약)』

공사기간 연장보고

2014. 12

체육시설관리사업소

『2014년 시설물유지보수공사(연간단가계약)』

공사기간 연장보고

『2014년 시설물유지보수공사(연간단가계약)』에 대한 공사기간을 다음과 같은 사유로 연장하여 공사현장 품질관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2014년 시설물유지보수공사(연간단가계약)

□ 공사기간 : 2014.02.19 ~ 2015.01.31

□ 시 공 자 : ㈜성준이앤씨 대표 이 후 옥

□ 공사금액 : 720,335,400원

Ⅱ		추 진 경 위

□ 2014. 02. 19 : 공사계약

□ 2014. 02. 19 : 공사착공

□ 2015. 01. 31 : 준공예정

Ⅲ		보 고 사 항

□ 공사기간 연기

구 분	공 사 기 간	연기일수	사 유
변경전	2014.02.19. ~ 2015.01.31	24일간	제1수영장 환경개선에 따른 2월휴장계획에 의거 논슬립 시공 등 시설개선(스포츠마케팅과-12235(2014.12.8.))
변경후	2014.02.19. ~ 2015.02.24

Ⅳ		검토의견

□ 제1수영장 환경개선 공사 시행을 위한 공기연장

❍ 2014년 시설물유지보수공사(연간단가계약)는 2015.1.31.일까지 계약으로 2월달 제1수영장 휴장에 따른 시설개보수공사 시행을 위해 2015.2.24.일까지 공기연장하여 원활한 시설개선공사 완료

Ⅴ		조 치 의 견

□ 시설공사 공기연장 계약

❍ 『2014년 시설물유지보수공사(연간단가계약) 업체와 2015.2.24.일까지 변경계약하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.  끝.