투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰

1. 생태공원과-2896(2014.12.16)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 양화한강공원 친수공간 조성 전기공사를 아래와 같이 설계변경 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 양화한강공원 친수공간 조성 전기공사

나. 공사기간 : 2013. 12. 31 ~  2014. 12. 30

다. 도 급 자 : ㈜금산트리피아   대표 김백순

라. 변경금액

(단위:원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급액	총 차	150,608,475	126,371,000	감) 23,237,475
	1 차	127,371,523	127,371,000	감) 523
	2 차	23,236,952	0	감) 23,236,952

마. 변경사유 : 현장여건 반영에 따른 신규공종 및 물량증감

바. 예산과목 : 한강사업본부, 한강생태계회복(복원), 양화한강공원생태공원    화사업, 시설비및부대비, 시설비(100-401-01)

붙임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	생태공원과장
주무관	임이환		생태공원과장	12/16 최병언
협조자
시행	생태공원과-2920	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25	/
전화	3780-0725	/전송	3780-0740	/		/	대시민공개