문서번호	시설관리과-26521
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강서수도사업소장
서장원		이자원	12/16 이상래
협조
	주무관		손종백

설계변경(3차) 심의위원회 개최결과

2014. 12

강서수도사업소

(시설관리과)

설계변경(3차) 심의위원회 개최결과

우리사업소에서 시행한 「2014년 강서구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」에 대한 설계변경(3차) 심의위원회 개최 결과임.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 강서구관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

나. 공사개요 : 원형제수변실 설치 176개소, 소화전 설치 및 보수 61개소

다. 공사기간 : 2014.  4. 2 ~ 2015. 3. 31

라. 계약금액 : 금622,096,520원

마. 도 급 자 : 나일건설,  대표 이 춘 화

2. 심의일시 : 2014. 12. 16(화) 15:00 〔강서수도사업소 4층 회의실〕

3. 설계변경 현황

가. 도급비 변경내역 (변경없음)

구 분	당초	변경	비 고 (증 ․ 감)
총공사비	917,725,520	917,725,520	-
도 급 비	622,096,520	622,096,520	증 ․ 감 없음
관급자재비	150,000,000	150,000,000	-
이 전 비	145,629,000	145,629,000	-

- 2014년 정산에 따른 차수별 금액 현황

구분	총부기금액(원)		1차분		2차분
	당초	변경	당초	변경	당초	변경
도급비	622,096,520	622,096,520	577,800,000	376,600,000	44,296,520	245,496,520

나. 설계변경사유

- 신규공종 발생 및 물량 증 ․ 감에 따른 설계변경 시행

․ 신규공종 : con포장절단(100~150㎜)외 39종

․ 물량증가 : 강관기계부설-이형관(D=900㎜)외 15종

․ 물량감소 : 인력터파기(견질토사 0-1m)외 83종

다. 주요공종 물량변경 내역

공 종	규 격	단 위	당초수량	변경수량	증ㆍ감
콘크리트 포장절단	100~150㎜	m	1042	1542	증) 500
제수변 부설 및 접합공	100㎜	개소	56	86	증) 20
강관기계부설(이형관)	900㎜	개소	0	4	증) 4
강관절단	900㎜, B종	개소	0	4	증) 4
강관접합(기계)-야간	800㎜, B종	개소	0	3	증) 3
강관 절단-야간	800㎜, B종	개소	0	2	증) 2
인력터파기	견질토사(0-1)	㎥	319	227	감) 92

4. 심의 주요내용

가. 설계변경의 타당성

나. 신규공종에 대한 단가적용 적정여부

다. 공종별 물량 증 ․ 감 적용 적정여부

라. 제경비 적정산정 및 적용 적정성

마. 계약금액 조정(차수별 부기금액 변경) 등

5. 설계변경 심의결과

가. 설계변경 : 타당

나. 신규공종 단가적용 : 적정

다. 주요 공종 물량 증 ․ 감 사항 : 타당

라. 제경비 산정 적용 : 적정

마. 계약금액 조정(차수별 부기금액 변경) : 타당

6. 조치계획

심사결과에 따른 설계변경 시행 및 본청 재무과에 변경계약의뢰.

붙  임  1. 설계변경 계획서 1부

2. 설계변경 내역서 1부

3. 설계변경 심의결과서 1부.