문서번호	정수과-9767
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
안영환		현인식	12/16 임정규
협조
	행정관리과장		안창수

차수별 물량조정에 따른

『사업장폐기물 처리용역』변경계약 추진 계획

2014. 12

영등포아리수정수센터(정수과)

사업장폐기물처리용역 변경계약 추진계획

『사업장폐기물 처리용역(단가계약)』과 관련하여 차수별 물량변동에 따른 변경계약을 다음과 추진하여 계약관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 용역계약 현황

○ 계약명 : 사업장폐기물(무기성 정수슬러지) 처리용역(장기계속 연간단가)

○ 용역기간 : 2014. 6. 1 ~ 2016. 5. 31

○ 계약상대 : 처리자[진명기업(대표 최환준)], 운반자[임송농산(대표 양기훈)]

○ 계약금액(1차수) : 금604,882,520원(총부기계약금액:금2,487,199,280원)

구 분	합계	2014년 (6.1~12.31)	2015년 (1.1~12.31)	2016년 (1.1~5.31)	비고
처리물량	75,600톤	18,600톤	41,000톤	16,000톤
금 액(원)	2,487,199,280원	604,882,520원	1,353,849,200원	528,467,560원

○ 세부계약 내역(2014년)

구 분	금액(원)	물량(톤)	단가(원/톤)		비고
			처리비	운반비
계	604,882,520	18,600	-	-
영등포	241,269,600	8,000	19,633.9	10,524.8
뚝도	201,834,600	6,000		14,005.2
구의	161,778,320	4,600		15,535.3

□ 변경계약 사항

○ 2014년도 사업장폐기물 처리현황(12.15일까지 물량)

- 처리물량 : 12,408톤(계약대비 6,192톤 감소)

- 처리금액 : 금400,987,340원(계약대비 금203,895,180원 감소)

구 분	처리금액(원)	처리물량(톤)	변동(톤)	비고
계	400,987,340	12,408	감6,192
영등포	169,612,440	5,624	감2,376
뚝 도	158,574,710	4,714	감1,286
구 의	72,800,190	2,070	감2,530

○ 변경계약 내용

- 차수별 물량 조정 : 금차분 감소물량(6,192톤)을 3차수로 이전

- 물량조정에 따른 차수별 금액조정 : 총액 변경없음

○ 세부 변경내역

- 차수별 물량조정                                               (단위:톤)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총물량		75,600	75,600	변동없음
차수별	1차(2014)	18,600	12,408	감6,192톤
	2차(2015)	41,000	41,000	변동없음
	3차(2016)	16,000	22,192	증6,192톤

- 물량조정에 따른 차수별 금액조정                                 (단위:원)

구 분		당 초	변경후	변동사항	비 고
총용역비		2,487,199,280	2,487,199,280	변동없음
차수별	1차(2014)	604,882,520	400,987,340	감203,895,180원
	2차(2015)	1,353,849,200	1,353,849,200	변동없음
	3차(2015)	528,467,560	732,362,740	증203,895,180원

□ 향후 일정

○ 2014. 12. 16 : 변경계약 방침

○ 2014. 12. 17 : 변경계약 의뢰(재무과)

○ 2014. 12. 19 : 변경계약 체결

○ 2014. 12. 22 : 구의, 뚝도 변경계약 결과 통보

○ 2014. 12. 23 : 준공검사

○ 2014. 12. 24 : 2차수 계약의뢰(재무과)

붙 임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경 내역서 2부.  끝.