문서번호	총무과-8277
결재일자	2013.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	총무부장	한강사업본부장
주병준	김영기	정진일	05/30 한국영

「한강 행복몽땅 프로젝트」 추진상황 보고

’13. 5. 30(목)

한강사업본부

(총무부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	자원봉사 등 행사참여	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	전문가 자문 반영	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	민간단체 행사참여	)	무 □
	●	기업	:	유 ■	(	민간업체 참여	)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	민간단체 참여 협의	)	무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	문화재단 행사참여	)	무 □

｢한강 행복몽땅 프로젝트｣ 추진상황 보고

□ 사업현황 : 총 3개 분야 30개 사업

■ 휴식공간 조성 등(10): 캠핑장, 낚시테크 조성, 꽃길조성, 씨름장 등

■ 문화・체험(10) : 명화상영, 수상음악회, 거리공연, 별보기체험 등

■ 수상・레져(10) : 배다리, 윈드서핑, 레포츠 체험, 수생태 체험 등

[사업변경내용]

- 제외사업(2) : 어린이 한강헤엄쳐건너기(덕수초교), 장애인수영 한강건너기(장애인체육회) ※ 7월초 개최

- 추가사업(1) : 서울 댄스프로젝트(문화재단)

- 분리사업(1) : 터널분수 수영장(당초「수영장‧물놀이장」사업에서 분리)

□ 추진상황 점검결과

① 정상추진 : 25개

② 관리대상 :  5개(협의, 보완 및 세부실행계획 수립필요)

○ 지  연(1) : 낚시데크 조성(부유식 보완으로 설계 20일 지연)

○ 차  질(1) : 선탠장(난지선탠장 모래톱 형성 지연)

○ 협의중(1) : 배다리(5.28협의, 국방부 6월초 현장방문 및 세부내용 논의)

○ 미계획(2) : 빅게임, 명화상영(6월초 세부 실행계획 수립 필요)

□ 사업별 추진내용

① 캠핑장(운영과, 블랙야크)

<운영과>

○ 시설공사 - 상‧하수도, 초소, 인터넷, 안내표지 등(6.3~6.28)

※ 와이파이 공사연계 : 전기공사 발주(6.5), 착공(6.20)

<블랙야크>

○ 홈페이지(http//hangangcamping.com) 오픈(6.3) 및 참가접수(6.10~)

○ “얼음위에서 키스 등” 이벤트(시장지시사항) 추진 협의((주)캠프엔)

② 낚시데크 - 일정지연(환경과)

○ 일정변경 : 설계완료 및 공사발주(당초 6.10→6.30), 공사착공(당초 7.1→7.20)

※ 장마영향, 국토교통부협의 지연시 착공 및 준공지연 예상

○ 지연사유

- 부유식의 고정용 로프가 낚시줄과 얽혀 문제가 있을 수 있다는 전문가 의견에 따라 부분고정 방식 보완 검토

③ 빅게임(Big Game) - 실행계획 수립 준비(문화홍보과)

○ 장소확정을 위한 현장 점검 완료(광나루, 이촌, 양화 등)

○ 운영방식 및 시민참여 계획 수립(6월초)

- 퀴즈출제

- 신청접수(7.1~7.10)

- 행사개최(7.24, 7.31, 8.7)

- 기념품 제공 검토

- 자원봉사 참여계획

④ 명화상영 - 실행계획 수립 준비(문화홍보과)

○ 한남대교 등 ‘다리밑 영화제’ : 상영작 시민선호도 반영 추진

○ 물빛무대, 광진교 8번가 등 ‘강변 영화제’ : 장소별 테마 차별화

- 여의도 물빛무대 : 애니메이션, 코믹 오락영화 등 유쾌한 작품

- 광진교 8번가  : ‘독립․예술영화와 로맨틱영화의 만남

- 반포 달빛광장 : ‘서울시 좋은 영화 감상회’ - 가족영화

⑤ 꽃이 만발한 한강공원 조성 - 정상추진(녹지관리과)

○ 백일홍, 수레국화, 끈끈이대나물 등 여름종 식재(23.3km, 14,608㎡)

○ 여름꽃씨 파종(4.20~5.15), 잡초 제거(5.10~개화시), 개화(6월말~8월)

⑥ 교량하부 휴게공간 - 비가림막, 휴게시설 설치공사 중(녹지관리과, 시설관리과)

○ 비가림막(2개소) : 가양대교(완공), 청담대교(6월초 설치 예정)

○ 잠실, 한남대교 등 14개소 휴게시설 설치 : 기반조성(~6.10), 완공(6.28)

⑦ 테마별 기획보도 추진(총무과, 문화홍보과)

○ 보도대상 : 캠핑장, 명화상영, 고량하부 휴게공간 등

○ 추진방법 : 방송, 신문 등 매체 협의(대변인 협조)

□ 보도자료 배포에 따른 대응조치

① 보도일 : 6.3(월)

② 대응조치

○ 언론취재 대응

- 비상근무 : 총무부(총괄), 각 부별 최소 인력(1명)

※ 기사 마감시간인 6.2(일) 12:00~17:00까지 문의가 많을 것으로 예상

※ 보도자료 배포에 따른 긴급대책 회의

- 일    정 : 5.31(금), 10:00(대회의실)

- 참석대상 : 프로젝트 TF팀, 각 사업담당자, 당직근무자 등

- 당직근무자 : 24시간 문의에 대응

○ 시민문의 대응

- 120(다산콜센터) 자료 제공 : 보도자료, 기타 사업내용 제공(각부서).끝.