함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 책임건설사업관리자
(경유)
제목	계약금액조정 심사 결과 통보(구의 과수퀜칭 및 AOP 설비)

1. 구의CM 제2014-627(2014.12.01)호와 관련입니다.

2. 「구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사」 잔류오존 제거시설 변경에 따른 계약금액조정 심사 결과를 아래와 같이 알려드리오니, 설계변경시 총공사비 범위내에서 반영하시기 바랍니다.

○ 심사결과                                             (단위:천원)

주요 내용	심사 결과			비 고
	요청액	조정액	증감액
잔류오존제거시설 변경 (친환경오존접촉조 → 과수퀜칭 + AOP설비)	증)172,700	증)145,200	-27,500	총공사비 증액 없음

붙임  1. 계약금액조정 검토결과 통보서 및 검토결과서 각 1부.

2. 조정내역서(설계서) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박태원		기전설비과장	서대훈		생산부장	12/16 박용철
협조자
시행	기전설비과-8434	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (생산부)	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	parkteria@seoul.go.kr	/	대시민공개