투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 포장도로정비 노면표시공사 도면제작 용역 설계변경(정산) 시행

우리 사업소에서 시행중인 『2014년 포장도로정비 노면표시공사 도면제작 설계용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 포장도로정비 노면표시공사 도면제작 설계용역

나. 용역기간 : 2014. 5.12 ~ 2014.12.31

다. 도 급 자 : ㈜건영이앤씨 대표 박준범

라. 설계변경내역

구 분		변 경 내 역			비 고
		당 초	변 경	증, 감
도급비	공급가액	8,766,364	9,905,919	증) 1,139,555
	부 가 세	876,636	990,591	증) 113,955
	손해배상보험료	75,000	85,000	증) 10,000
	합 계	9,718,000	10,981,510	증) 1,263,510

마. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비및부대비, 시설비(기품의No.20, 2014.5.1)

붙임  1. 방침서 1부.

2. 설계변경사유서 1부.

3. 설계변경(정산)내역서 1부.  끝.

주무관	이문희		주무관	박일연		도로보수과장	12/16 손수희
협조자	주무관	이민호
시행	도로보수과-7450	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지) 동부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0342	/전송	02-2040-0307	/	twodoor@seoul.go.kr	/	대시민공개