투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 - 한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역

1. 생태공원과-2890(2014.12.16.)호와 관련입니다.

2.『한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역』건에 대하여 다음과 같이 변경계약하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체	계약금액(원)	계약기간
한강 이촌권역 자연성 회복사업 기본 및 실시설계용역	동부엔지니어링 주식회사	231,297,000	2014.4.25. ~ 2014.12.24.

나. 변경내역                                             (단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	비 고
준공기한	2014.12.24.	2015.2.24.	62일 연기

다. 변경사유 : 한강시민위원회 자문내용 반영에 따른 과업기간 연장 및 용역 후 하천점용허가 신청에 따른 협의기간 소요

붙임 : 변경계약 요청 의뢰서 일체.  끝.

주무관	이재승		총무과장	최대봉		총무부장	전결 12/16 서영관
협조자
시행	총무과-19178	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	existwin@seoul.go.kr	/	부분공개