문서번호	시설과-8916
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
박도복	이재복	함석주	12/16 이용태
협 조

『2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』 작업지시(8차) 완료보고

2014. 12

중부공원녹지사업소

시 설 과

남산공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

작업지시(8차) 완료보고

남산공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 8차 작업지시사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

▢ 관련근거

○ 시설과-8669호(2014. 12.08) : 제 8차 작업지시

▢ 공사개요

○ 공사명 : 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 도급자 : 해주전설 (대표 : 구대원)

○ 공사금액 : ₩131,181,680원

○ 공사규모 : 노후 공원등, 케이블 및 분전반 설비 정비 등

▢ 8차 작업지시 사항 및 작업 결과

○ 대 상 : 제 8차 작업지시분

○ 기 간 : 2014. 12. 8 ~ 2014. 12. 17(10일)

○ 작업금액 : ₩16,401,318원

작업지시내용	작업결과	증감사유	비고
○ 필동족구장 조명설비 보완
- 투광등 6개, 완금 2개 설치 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	- 투광등 6개, 완금 2개 설치 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	-	공원조성과-12409 (2014.10.22)※시의원 요구사항
○ 남산산악회-남산체육회 간 조명 보완
- 보안등 설치	- 보안등 2개소 설치 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	-	-
○ 장충체육회 부근 조도개선
- 공원등주 1본 및 조명등 1개 설치 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	- 공원등주 1본 및 조명등 1개 설치 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	-	-
○ 한양도성 순성길 정비
- 남산체육회 철거지 옆 분전반 이전 - 성벽 경관조명 케이블선 정비	- 남산체육회 철거지 옆 분전반 이전 - 성벽 경관조명 케이블선 정비	-	기획담당관-17834 (2014.11.28) ※부시장 지시사항
○ 매표소 계량기 설치
- 매표소 전력 계량기함 설치 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	- 매표소 전력 계량기함 설치 - 기타 부대공사(배관·배선 등)	-	남산공원내 매표소 전기사용신청 <공원운영과-22974>

▢ 작업물량

○ 첨부 내역서 참조

▢ 연간단가 공사비 현황

작업지시	작업내용	차수별공사금액	잔액
1차	낙산공원 한전전원 인입선로 신설등 4건	-	-
2차	중랑캠핑숲 주차장 확충공사등 8건	-	-
3차	남산공원 잠두계단 공원등 보수등 11건	-	-
4차	중랑캠핑숲 공원등 조도개선등 4건	-	-
1차기성		82,709,000	48,472,680
5차	남산공원 등기구 교체등 2건	27,685,780	20,786,900
6차	남산공원 상춘약수터 전력간선 공사등 2건	6,057,231	14,729,669
7차	북측순환로 공원등주 59~62번 보수등 3건	7,112,892	7,616,777
8차	필동족구장 조명설비 보완등 5건	16,401,318	-8,784,541
소계		139,966,221

▢ 향후계획

○ 금회 작업으로 발생한 일부 부족액(8,784천원)은 남산공원 및 산하공원 시설물 보수정비 시설비 잔여예산을 활용 설계변경(증액)하여 정산코자 함.

첨부  1. 제8차 작업완료 내역서 1부.

2. 작업사진 1부 별첨. 끝.