투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	내부결재
(경유)
제목	전시동 기계설비 및 임시수장고 개선공사에 대한 설계변경 및 정산보고

전시동 기계설비 및 임시수장고 개선공사에 대하여 아래와 같이 설계변경과 정산을 시행하여 공사 품질관리에 만전을 기하고자 보고합니다.

가. 건    명 : 전시동 기계설비 및 임시수장고 개선 공사

나. 시 공 사 : 대성기술이앤씨㈜ 대표 손주형

다. 공사기간 : 2014.09.19. ~ 2014.12.23

라. 주요 변경내용

○ 임시수장고 및 문서고 자동제어 상태점 추가

○ 임시수장고 렉 철거 부분 바닥 에폭시 및 내벽 도색 등 추가

마. 금액 변경 및 정산금액

(단위:원)

계약금액	변경금액(A)	정산금액(B)	증,감(B-A)
209,795,700	233,970,000	230,395,000원	감3,575,000

※ 기 지급된 노무비 : 금19,228,000원(10월분 4,730천원, 11월분14,498천원)

바. 예산과목 : 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 미술관 유지보수, 시립미술관 유지관리, 공공운영비.

따로붙임 : 1) 설계변경 및 정산 보고서 1부.

2) 변경 내역서 1부.

3) 안전관리비 내역서 1부.

4) 설계변경 및 정산보고(도급자) 1부.

5) 작업지시서 1부.   끝.

주무관	이강욱		총무과장	김정회		경영지원부장	12/16 이성규
협조자	주무관	한덕주
시행	총무과-13865	(		)	접수		(		)
우	100-813	서울특별시 중구 덕수궁길 61	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	02-2124-8817	/전송	02-2124-8830	/	24326@seoul.go.kr	/	부분공개