함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』 준공기한 연기 의뢰

1. 고도정수반-6297호(2014.12.11.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 “구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 현황

1) 공 사 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

총차분, 6차분(금차분)

2) 공사개요 : 재건설 25만톤/일, 고도정수처리시설 45만톤/일, 관리본관 신축 등

3) 공사기간

- 총  차  분 : 2009.11.23. ~ 2014.12.20.

- 6차분(금차) : 2014.01.08. ~ 2014.12.20.

4) 계 약 자 : ㈜대우건설 대표 박영식외 2개사

나. 준공기한 연기의뢰 내역 (총차분, 금차분)

- 총차분

당초 : 2009.11.23. ~ 2014.12.20.  변경 : 2009.11.23. ~ 2015.04.20.

- 6차분(금차)

당초 : 2014.01.08. ~ 2014.12.20.  변경 : 2014.01.08. ~ 2015.04.20.

다. 준공기한 연기 사유

○ 양진초.중학교앞 보안휀스 이전 설치 및 구의.뚝도 대체급수 송수관로 공사 추가시행으로 준공기한 연기사유 발생사항 반영

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기에 따른 합의서(원본 별도송부) 1부.

2. 보안휀스 이전 및 대체급수 송수관로 공사시행 방침 1부. 끝.

	시설안전부장
주무관	이재학		고도정수반장	남정열		시설안전부장	12/16 이규상
협조자
시행	고도정수반-6403	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 51	/
전화	1453	/전송	3146-1429	/	hak2509@seoul.go.kr	/	대시민공개