문서번호	정수시설과-8776
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동	현인식	12/16 임정규

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

[기계설비 유지보수 공사(연간단가)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

영등포아리수정센터

정수시설과

설계변경 심의워원회 개최 결과보고

기계설비 유지보수 공사 시행중 물량 증․감 및 신규공정 발생에 따른 설계변경 사유가 발생하여 자체 심의위원회를 개최하고 심의의결내용에 따라 아래와 같이 설계변경을 시행코자 함.

공사현황

공 사 명 : 기계설비 유지보수 공사(연간단가)

공사개요

- 모터펌프 분해정비 및 축정렬, 엑츄에이터 수리 등

도 급 액 : 일금58,388,380원

착 공 일 : 2014. 04. 07

준 공 일 : 2014. 12. 20

계 약 자 : 남영이엔지(주) 대표 최 병 국

심의위원회 심의결과

위 원 장 : 정수시설과장

위   원 : 공업6급 김오열외 3명, 간사 1명

일   시 : 2014.12.16(화) 10:00 ~ 11:00(2층 사무실)

안   건 : 기계설비 유지보수 공사 설계변경 적정성 여부 및 내역 검토

심의결과 : 적정함

심의위원회 심의내용

시공물량 증 ․ 감에 대한 적정성 검토

신규공정 산출, 적용 적정성 검토

제경비 정산(보험료 정산 등) 적정성 검토

변경 공사비

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당초금액	변경금액
공사원가	53,080,346	52,529,000	감) 551,346
부가가치세	5,308,034	5,252,900	감) 55,134
총공사비	58,388,380	57,781,900	감) 606,480

조치의견

위와 같이 시공물량 변동 및 신규공종 발생으로 인한 설계변경을 자체 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

따로붙임 : 심의위원회 의견서 1부. 끝.