함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	구의정수센터 시설공사 완료에 따른 시운전(풀부하)협조요청

우리부서에서 시행중인『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』의 고도정수처리 시설이 완료됨에 따라 생산량 검증을 위한 풀부하 시험운전을 아래와 같이 시행코자 하오니 급수운영에 협조 바랍니다.

가. 풀부하 운전시 배수지별 송수량

- 월계배수지 : 15만톤/일

- 용마배수지 : 15만톤/일 (현재 공급중)

- 아차산배수지 : 6만톤/일 (현재 공급중)

(※ 월계배수지는 대현산 송수관 이중화 부설공사 완료시 까지 계속 공급)

나. 협조사항 (※ 세부일정 추후 협의 예정)

- 배 수 과

‧ 수계변경, 배수지 수위확보 등 급수운영 전반적인 사항

‧ 월계배수지 송수라인 세척

- 구의아리수정수센터

‧ 월계배수지 송수라인 세척 및 풀부하 시운전 관련 정수장 운영

(12월 19일(금) 월계배수지 송수라인 세척 예정)

- 감리단 및 시공사

‧ 풀부하 시험운전(펌프운용계획 포함) 계획서 제출 요(12월 17일한)

‧ 12월 19일(금) 월계배수지 송수라인 세척 가능토록 조치 요.

‧ 월계배수지 송수라인 세척 및 시험운전 대비 시설물 점검. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	배수과장,구의정수센터 고도정수처리시설 및 재건설공사 CM단,구의아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장)
주무관	라승보		고도정수반장	전결 12/16 남정열
협조자	주무관	이재학
시행	고도정수반-6395	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1456	/전송	3146-1529	/	raseoungbo@seoul.go.kr	/	대시민공개