『공사연기 보고서』

문서번호	결재	주무관	지방시설사무관대우	급수운영과장
급수운영과-23354		김종필토	이승완	12/16 김수영

명에 의거 『노원구 관내 급수공사(연간단가)』 감독업무 수행중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

2014 . 9. 30

보고자 :   지방시설주사보   김 종 필

□ 현  황

○ 공 사 명 : 2014년 노원구 관내 급수공사

○ 위    치 : *************** (지시번호 : 신설86)

○ 도 급 자 : 창협건설(주) 대표 ***

○ 공사개요 : D=30~50mm, L=20m

○ 공사기간 : 2014. 12. 11 ~ 2014. 12. 18.

□ 보고내용

○ *********** 신축건물에 대한 급수공사 신청에 따른 급수공사(D=30~50mm, L=20m) 작업지시(2014. 12. 10)를 하였으나,

○ 수요가 건축현장의 자재적치 등 건축공사 공정에 따른 자체 내부사정으로 인하여 급수공사 연기를 요구하였기에 부득이 당초 기한내 공사준공이 불가능한 실정임.

※ 공사연기원 접수(2014. 12. 15)

□ 처리의견

○ 상기와 같이 수요가 원에 의거 공사기간내 공사완료가 불가능하므로 당초 공사기간을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사기간 (당초) : 2014. 12. 11 ~ 2014. 12. 18.

(변경) : 2014. 12. 11 ~ 2014. 12. 24.  끝.

부분공개