문서번호	토목부-24989
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이한규		최광무	12/16 노우성
협조

선사로~고덕지구간 도로확장공사 부지내 무연분묘 이장 용역 설계변경 보고

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 선사로~고덕지구간 도로확장공사 부지내 -

무연분묘 이장 용역 설계변경 보고

선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 구간내 흙깍기 작업을 위하여 벌목작업 결과 연고자를 알수 없는 무연 봉분묘2기(2기합장)가 추가로  발견되어 봉분묘 기수 증가와 문화재조사 구간내 인골 물량 증·감에 따른 설계변경 검토보고 임

관련근거

○「장사 등에 관한 법률」 제8조·제27조

용역개요

○ 용 역 명 : 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 부지내 무연분묘 이장 용역

○ 용역내용

- 봉분 무연묘 5기

- 문화재 조사시 발굴 인골 13기(추정 4기 포함)

○ 용역기간 : 2014.10. 2. ~ 2014.12.30.

○ 도 급 비 : 8,600,000원

○ 용 역 사 : (주)건국공영

추진경위

○ 2014. 9.30. : 용역시행(토목부-18899호<2014. 9.30.>)

○ 2014.10. 2. : 용역 착수

설계변경 보고

○ 설게변경 사유 : 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 구간내 흙깍기 작업을 위하여 벌목작업 결과 연고자를 알수 없는 무연 봉분묘2기(2기합장) 추가 발견과 문화재조사구간 내 인골 물량 증·감에 따른 설계변경 시행

○ 변경 내용

구분	봉분묘		문화재 조사시 발굴된 인골
	당 초	변 경	당 초	변 경
기 수	5기	7기(합장 2기)	13기	11기
도급비	2,900,000원	4,640,000원	5,700,000원	4,823,000원

조치의견

○ 선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사 구간내 흙깍기 작업을 위하여 벌목작업 결과 연고자를 알수 없는 무연 봉분묘2기(2기합장) 추가 발견에 따른 봉분묘 기수 증가와 문화재조사 구간내 인골 물량 증·감에 따른 설계변경이 필요함

- 추가 용역비 : 863천원

붙 임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 관련공문 1부.   끝.