문서번호	한양도성도감-11549
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
이정식		신추교	12/16 심말숙
협조

한양도성 단절구간 연계성 회복 기본계획 및 실시설계 용역

용 역 계 약  변 경 계 획

2014. 12.

문화관광디자인본부

(한양도성도감)

한양도성 단절구간 연계성 회복 기본계획 및 실시설계 용역

용 역 계 약  변 경 계 획

과업내용 추가, 한양도성 자문위원회 자문 등 신중한 계획 수립을 위해 ｢서울 한양도성 단절구간 연계성 회복을 위한 기본계획 및 실시 설계 용역｣ 의 계약기간을 연장하여 추진코자 함

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 서울 한양도성 단절구간 연계성 회복을 위한 기본계획 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : ’14.7.2 ~ ’15.2.2  (계약일자 ’14.6.25)

○ 용역기관 : ㈜한인건축사사무소 + ㈜메카조형그룹

○ 계약금액 : 199,600천원

Ⅱ		그간 추진경위

○ ’14. 7.  2.   용역계약 체결 및 착수

○ ’14. 7.  2.   착수보고 (한양도성자문위원회)

○ ’14. 7.~11.  한양도성자문위원회 자문 (8회: 본회의5, 소회의3)

- 과업범위가 너무 넓으므로 2~3개소를 정해 단절구간 연결방법(디자인)에 집중

- 문화재 보존관리차원의 전체적인 기본 가이드라인 선행 연구

- 디자인은 현장분석, 사례검토, 거기에 맞는 분명한 논리를 통해 구체적인 안 제시

- 횡단보도 설치 등 좀 더 적극적인 방안을 검토해 볼 것 등

○ ’14.11.11.    변경 계약체결 (과업내용 추가)

- 변경 사유 : 계획 연속성 확보를 위해 그동안 원형고증 절차를 완료한  ‘흥인지문 북측 성곽복원 (21m) 설계 ’를 과업내용에  추가

- 변경 금액 : 160,829천원 ⇀ 199,600천원 (38,771천원 증)

Ⅲ		변경내용

: 계약기간 연장 (금액변동 없음)

최초 계약기간	금회 연장	비 고
`14.7.2. ~ `15.2.2	`14.7.2. ~ `15.4.2	59일 연장

※ 계약금액 변동 없음

Ⅳ		변경사유

○ 한양도성 단절구간 연결의 방향성과 기준을 잡는 중요한 사업 으로, 전문가 자문과정에서 학술적 연구 선행, 좀 더 수준 높은 디자인 확보 등 요청사항 반영에 따른 추가 검토시간 소요

- 해당사업은 2011년부터 진행된 상부 형상화 중심의  ‘기본계획’이 세계 유산관점에서 진정성 훼손 우려로 보류된 이후 재 추진하는 사업임.

- 시행착오를 사전에 예방하고, 심도 있는 검토를 위해 과업초기부터 전문가(한양도성자문위원회 등)를 참여시켜 진행하여 왔음

- 전문가 자문결과를 반영하는 과정에서 검토 시간과 자문 횟수 증가 (계획 5회 ⇀ 8회, 향후 3회 이상 추가 자문 예상됨)에 따른 기간 소요

‧ 학술적 연구 선행 (추정선 확인을 위한 정확한 고증연구 등)

‧ 좀 더 수준 높은 디자인 확보

‧ 동선연결을 위한 횡단보도 설치, 인접 한양도성 복원사업과 연계 추진 등

○ 원형고증 절차 완료(’14.9)후 복원 결정된  ‘흥인지문 북측 복원 설계(21m)’를 과업내용에 추가함에 따른 용역수행기간 확보 필요

⇒ 위 사항 등을 감안할 때 용역수행에 필요한 절대기간이 부족하므로 계약기간을 연장하고자 함

Ⅴ		행정사항

○ 용역수행업체와 계약기간 연장 합의

○ 기술용역 계약기간 연장 요청 (재무과).  끝,