문서번호	치수과-2145
결재일자	2013.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	치수과장	시설부장	한강사업본부장
권혁정	김종득	김만수	06/24 한국영

나들목 타당성조사 용역 계획

(자양나들목 개선사업)

2013. 6

한강사업본부

(시설부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

나들목 타당성조사 용역 계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(자양나들목 개선사업)

통로폭이 좁아 보행자 및 차량의 이용불편, 사고위험이 많은 자양나들목의 개선을 위한 타당성 조사용역를 시행하여 자양나들목 이용시민의 불편 해소 방안을 마련하고자 함

□ 사업개요

○ 자양나들목 옆에 보행자 전용 나들목 신설

- 규    모 : 폭 5m, 높이 3.5m, 연장 47m

- 사 업 비 : 7,100백만원 (설계비 300, 공사비 6,200, 감리비 600)

□ 추진경위

◦ 2012. 4. 20 : 시의회 시정질문 237회 (박래학 시의원)

- 자양나들목을 일방향에서 양방향으로 통행변경하고 보행자전용 나들목 신설 요청

◦ 2012. 11    : 2013년 자양나들목 타당성 조사 예산 편성 (100백만원)

◦ 2013. 4. 12 : 투자심사 요청

◦ 2013. 4. 23~26 : 현장조사

- 4개부서 (재정담당관, 서울연구원, 예산담당관, 기술심사담당관)

◦ 2013. 5. 22 : 투자심사 소위원회

- 내부위원 4명(행정과장, 예산담당관, 재정담당관, 기술심사담당관), 외부위원 4명

◦ 2013. 5. 29 : 투자심사 본위원회

- 내부위원 4명(행정과장, 예산담당관, 재정담당관, 기술심사담당관), 외부위원 9명

◦ 2013. 5. 31 : 투자심사 결과 통보 (재검토)

- 본 사업은 차량 및 보행자 겸용인 자양나들목을 차량전용으로 변경하고 보행전용 나들목을 신설하고자 하는 사안이나,

□ 인근에 기존 나들목이 다수 있으므로 추가 신설보다는 차량속도제한 등 운영방법 개선을 통한 차량 및 보행자 안전 확보방안 등 검토가 필요함

□ 조치계획

◦ 투자심사 시 차량 및 보행자의 이용량 ․ 현황 분석과 사업 시행에 대한 심도있는 검토가 필요하다는 심의위원들의 지적이 있어

◦ 타당성(사업영향, 경제성 등) 분석 및 기타 안전확보 방안 검토를 위한 타당성 조사용역을 시행하여 자양나들목 이용시민의 불편 해소 방안을 마련하고자 함

- 자양나들목 개선사업 타당성 조사 용역

․ 용 역 비 : 30,899천원

․ 용역기간 : 2013.6~2013.9 (3개월)

․ 과업내용 : 자양나들목 개선사업 타당성 조사 및 기타 안전확보방안 검토

□ 보행자 전용 나들목 신설(폭 5m, 높이 3.5m, 연장 47m)

- 예산과목

․ 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비, 타당성 조사용역(자양나들목) : 금년예산 100백만원

따로붙임 : 1. 사업설명서 1부

2. 설계내역서 1부. 끝.