투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행(2014도로시설물 보수공사 건설폐기물 처리용역)

우리사업소에서 시행중인 『2014 도로시설물 보수공사 건설폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하오니 변경계약 절차를 진행하여 고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014 도로시설물 보수공사 건설폐기물 처리용역

나. 용역기간 : 2014.4.25 ~ 2015.2.28

다. 도 급 자 : ㈜상익공영 대표 노승희, 우광개발(주) 대표 임태권

라. 설계변경(정산) 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	비 고
총용역비	70,480,000	59,290,000	감)11,190,000

마. 설계변경 사유 : 작업 완료한 폐기물량 정산

바. 예산과목 :

- 자동차전용도로 시설물 일상유지보수공사(성동) : 도로시설관리, 자동차전용도로교량관리, 자동차전용도로 도로시설물 일상유지보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 한강일상유지보수공사(성동) : 교량관리, 한강교량관리, 한강교량 일상유지보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 2014 영동대교 보수공사 : 교량관리, 한강교량관리, 영동대교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

- 아차산교 교면포장 개량공사 : 도로시설관리, 자동차전용도로 고가차도 및 입체교차로 관리, 자동차전용도로 시설물 교면포장개량공사, 시설비 및 부대비, 시설비

첨부  1. 변경 설계내역서(정산) 및 수량산출서 1부.

2. 설계변경(정산) 검토 보고 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김근섭		교량보수과장	代김형섭		성동도로사업소장	12/17 정진오
협조자
시행	교량보수과-3899	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장길 41(용답동 251-14)	/
전화	02)2210-1583	/전송	02)2210-1587	/	kgs727@seoul.go.kr	/	대시민공개