문서번호	도로보수과-11275
결재일자	2014.12.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		이규철	12/17 김만수
협조
	주무관		이상하

2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토 보고(제3차)

2014.  12. 17(수)

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토 보고(제3차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 03. 27 ~ 2015. 02. 28

○ 시 공 사 : 아람건설(주) 대표 김익신

○ 도 급 비 : 395,626,440원

○ 공사규모

- 노면표시 도색   L= 244,442m

- 노면표시 제거   L=    5,606m

- 도로표지병 설치 N=       34개

- 도로표지병 철거 N=       20개

□ 설계변경 사유

○ 금화터널 주변 교통안전시설물 개선공사 협조요청 및 예산 재배정(교통운영과-18498, ‘14.10.06) - 24,638천원

- 특별도로교통안전진단 시행구간으로 긴급히 공사를 완료하여 교통사고 예방 및 피해를 줄이고자 기 시행중에 있는 ‘14년 노면표시 유지보수공사 연간단가에 포함 시행.

○ 수색역 삼거리 교통안전시설 개선공사 협조 요청 및 추가예산 재배정(교통운영과-20999, ‘14.11.08) - 85,987천원

- 특별도로교통안전진단 시행구간으로 긴급히 공사를 완료하여 무단횡단으로 인한 교통사고 예방 및 피해를 줄이고자 기 시행중에 있는 ‘14년 노면표시 유지보수공사 연간단가에 포함 시행.

○ 2014년 도로굴착복구공사(연간단가) 발주계획(도로보수과-1476, ‘14.02.27)

- 도로굴착 관리청 복구구간 노면표시 도색공사로서 노면표시 품질확보를 위하여 기 시행중에 있는 ‘14년 노면표시 유지보수공사 연간단가에 포함 시행.

○ 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 이전비를 도급비로 집행 및 잔여예산 관급자재(특수페인트) 구매.

□ 설계변경 내역

○ 설계변경 금액

(단위 : 원)

공 사 명	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	758,134,540	887,548,530	증)129,413,990
도 급 비	395,626,440	470,872,370	증) 75,245,930
관급자재비	358,508,100	416,676,160	증) 58,168,060
이 전 비	4,000,000	0	감) 4,000,000

○ 주요공정 및 수량 변경내역

공 사 명	단위	당 초	변 경	증·감
노면표시 도색	m	244,442	278,979	증) 34,537
노면표시 제거	m	5,606	9,054	증) 3,448
도로표지병 설치	개	34	33	감) 1
도로표지병 철거	개	20	53	증) 33

○ 예산별 집행내역

(단위 : 원)

공 사 명	예산배정액 (집행잔액)	발주 집행액			잔 액	비 고
		도급비		관급비
도로교통소통개선사업	110,625,000	39,372,010			71,252,990 (교통부속물 등)	금화터널 수색로
		25,738,010	13,634,000
도로굴착복구	81,365,600	81,365,600			0	굴착복구 기금
		45,507,920		35,857,680
노면표시 도색	12,676,380	12,676,380			0	이전비 및 미집행액
		4,000,000		8,676,380

○ 예산과목

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 도로교통소통개선, 시설비 (25,738,010원)

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비 (45,507,920원)

- 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 노면표지선 도색 및 제거, 시설비 (4,000,000원)

□ 조치계획

○ 상기 보고내용을 반영하여 붙임 변경내역서와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

붙 임 : 변경 설계내역서(제3차) 1부.  끝.